첨부 2	과제제안요구서(RFP)

방사능 피해예측 및 저감기술							총괄
과제명			방사능 오염예측, 측정 및 저감기술			RFP 번호		1
■ 최종목표 - 고성능 클러스터 웹서버 기반의 실시간 방사능오염 평가 통합관리 시스템 구축 - 국내실정에 맞는 휴대용 방사능오염측정기 보급기반 조성 및 성능시험 시스템 구축 - 방사성핵종 식물정화 통합시스템 구축을 통한 방사능 비상사고 대응 및 국민안전 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '15 ～ '17 )					2단계 ( '18 ～ '19 )
- 고성능 클러스터 및 대기/해양 이동예측 시스템 구축 및 시스템 운영을 위한 자료 DB 구축 - 고검출/고분해능 반도체형 오염측정기 및 기체형오염측정기 시제품개발 - 방사성핵종 제염효율이 우수한 유용 식물체 확보 및 방사능제거 통합시스템 구축					- 웹기반 연동 모듈 및 GUI 환경 구축/실시간 평가 및 운영을 위한 시스템 안정화 - 방사능오염측정기 시제품 성능인증, 보급 및 국제규격에 적합한 성능시험 시스템 구축 - 방사능제염 통합 시스템의 field 적용 시험 및 제염효율 모델링 및 예측 시나리오 개발
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘15년도
• 대기 및 해양 환경내 방사성물질 이동경로 예측 모델 구축 • 오염측정기 센서 설계 및 에너지 분해능 측정시스템 구축 • 방사성핵종 제염 유용 후보 식물체 탐색 및 선발 • 방사성핵종 제염 통합시스템 개념 수립 및 장치구성
‘16년도
• 고성능 클러스터 설계 및 하드웨어 구축 • 방사성물질 이동경로 예측 모델 병렬화 시스템 구축 • 오염측정기 센서 에너지분해능 개선 알고리즘 및 센서 프로토타입 개발 • 차세대 기체형 오염측정기 센서 프로토타입 개발 • 방사성핵종 제염 유용 후보 식물체 개발 및 평가 • 시스템 성능시험 및 장치 업그레이드
‘17년도
• 인간 및 환경에 미치는 위해도 평가기술 연동 체계 개발 • 시스템내 주요 자료 DB 연동 모듈 구축 • 방사능 오염 통합 시스템 신뢰성 향상을 위한 품질보증 확립 • 실험실 기반 반도체형오염측정기 및 기체형오염측정기 시제품개발 • 방사성핵종 제염효율 평가 및 최종 유용 식물체 선발 • 방사능제거 통합시스템 구축 및 제염효율 평가
‘18년도
• 방사능오염 발생시 대기/해양내 확산경로 신속 예측 비상대응 시스템 구축 • 저노이즈 소형화기술이 적용된 휴대성이 강화된 시제품개발 • 국제규격에 적합한 오염측정기 성능시험기술 개발 • 방사성핵종 제염 통합시스템의 field 적용 시험 • 제염효율 예측 모델 및 시나리오 개발
‘19년도
• 방사능 오염 통합 시스템 운영 및 안정화 확립 • 보급형으로 대량생산이 가능한 오염측정기 시제품 개발 • 방사능오염측정기 성능시험시스템 확립 • 방사성핵종 제염 통합시스템의 적용 시험 및 구축 완료 • 제염효율 예측 시나리오 개발 및 대응전략 수립
■ 특기사항 • 총 5년(264.5억) : 15년(4.5억) / 16년(30억) / 17년(50억) / 18년(80억) / 19년(100억)

방사능 피해예측 및 저감기술							세부
과제명			웹기반 방사능오염 예측시스템 구축			RFP 번호		1-1
■ 최종목표 - 고성능 클러스터 웹서버 기반의 실시간 방사능오염 평가 통합관리 시스템 구축을 통한 방사능 오염으로부터 국민 안전 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '15 ～ '17 )					2단계 ( '18 ～ '19 )
- 고성능 클러스터 및 대기/해양 이동예측 시스템 구축 - 시스템 운영을 위한 주요 자료 DB 구축					- 웹기반 연동 모듈 및 GUI 환경 구축 - 실시간 평가 및 운영을 위한 시스템 안정화
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘15년도
• 대기 및 해양 환경내 방사성물질 이동경로 예측 모델 구축 - 지역규모 및 지구규모 3차원 대기/해양 이동경로 예측모델 구축 및 검증기술 개발 - 기상 및 해양 순환 수치예보자료 연동 모듈 구축
‘16년도
• 고성능 클러스터 설계 및 하드웨어 구축 - 대용량 수치예보자료 수신서버 설계 및 구축 - 연산속도 향상을 위한 클러스터 최적화 설계 및 Raid 하드디스크 안정화 • 방사성물질 이동경로 예측 모델 병렬화 시스템 구축 - MPI 기법을 이용한 모델 병렬화 프로그램 개발 - 시스템 안정화 및 연산속도 향상 모듈 구축
‘17년도
• 인간 및 환경에 미치는 위해도 평가기술 연동 체계 개발 - 환경내 방사성물질로부터 인체 위해도 평가 pathway 모듈 개발 - 인체 위해도 평가 모듈 구축 및 시스템 내 병합모듈 개발 • 시스템 내 주요 자료 DB 연동 모듈 구축 - 기상 및 해양 순환 수치예보자료 연동 모듈 구축 - 기상/해황/인구밀도/토지이용도/식품섭취/핵종 전이계수 등 자료 구축 • 방사능 오염 통합 시스템 신뢰성 향상을 위한 품질보증 확립 - 국내 및 국제 수준의 품질보증 수행 및 시스템 품질보증 절차서 구축
‘18년도
• 방사능오염 발생시 대기/해양내 확산경로 신속 예측 비상대응 시스템 구축 - 고성능 클러스터 웹기반 시스템 연동 및 통제모듈 개발 - GUI 모듈을 이용한 신속 예측 비상대응 시스템 구축 - 웹서버 구성요소/클러스터 동기화 모듈 구축 - 사용자 그룹 형성 및 매뉴얼 구축
‘19년도
• 방사능 오염 통합 시스템 운영 및 안정화 확립 - 실시간 평가를 위한 시스템 최적 모듈 구축 - 주변국 사고를 대비한 사용자 훈련 체계 구축 - 시스템 실시간 운영 및 고도 관리체계 구축
■ 특기사항 • 총 5년(86.5억) : 15년(1.5억) / 16년(10억) / 17년(15억) / 18년(30억) / 19년(30억)

방사능 피해예측 및 저감기술							세부
과제명			휴대용 개인 방사능오염측정키트 시제품 개발 및 성능인증시스템 구축			RFP 번호		1-2
■ 최종목표 - 국내실정에 맞는 성능과 민감도를 보유한 휴대용 방사능오염측정기 보급기반 조성 및 성능시험 시스템 구축 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '15 ～ '17 )					2단계 ( '18 ～ '19 )
- 실험실 기반 반도체형오염측정기 및 기체형 오염측정기 시제품개발 - 보정 알고리즘 개발을 통한 고검출 효율 및 고 분해능달성					- 방사능오염측정기 시제품 성능인증 및 보급 기반 조성 - 국제규격에 적합한 방사능 오염 측정기 성능시험 시스템 구축
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘15년도
• 오염측정기 센서 설계 및 에너지 분해능 측정시스템 구축 - 에너지 분해능 최적화를 위한 상온반도체검출기 전극설계 - 디지털신호처리방식에 의한 에너지분해능 측정시스템 구축
‘16년도
• 오염측정기 센서 에너지분해능 개선 알고리즘 및 센서 프로토타입 개발 - 센서 제작 및 에너지분해능 등 센서 방사선특성 조사 - 전하수집효율 비균질성 보정 알고리즘 개발을 통한 고검출 효율 및 고분해능 달성 • 차세대 기체형 오염측정기 센서 프로토타입 개발 - 고효율 가스검출기의 구성을 위한 양극과 음극의 최적물질 개발 - 가스 혼합의 최적화, 검출회로의 적정성, 구조개선등을 통하여 기체형 검출기 센서 개발
‘17년도
•실험실 기반 반도체형오염측정기 및 기체형 오염측정기 시제품개발 - 3차원 위치 민감형 감마선분광분석 오염측정기 시제품 개발 - 음식물 방사능오염의 기준인 100 Bq/kg을 10분 이내에 판별가능한 민감도를 갖는 시제품개발
‘18년도
• 저노이즈 소형화기술이 적용된 휴대성이 강화된 시제품개발 - ASIC 기반 신호처리 기술이 적용된 소형화된 시제품개발 • 국제규격에 적합한 오염측정기 성능시험기술 개발 - 방사능오염측정기 성능 시험 항목별 시험절차 수립 - 최소검출방사능 (MDA) 시험인증 기술개발
‘19년도
• 보급형으로 대량생산이 가능한 오염측정기 시제품 개발 - 독립적인 성능시험기관을 통한 시제품 실증 및 대량보급을 위한 법제도 개선 기반 조성 • 방사능오염측정기 성능시험시스템 확립 - 시판 중인 방사능오염측정기 성능시험 서비스 시범실시
■ 특기사항 • 총 5년(101.5억) : 15년(1.5억) / 16년(10억) / 17년(20억) / 18년(30억) / 19년(40억)

방사능 피해예측 및 저감기술							미래부
과제명			방사능 식물정화기술 개발			RFP 번호		1-3
■ 최종목표 - 방사성핵종 식물정화 통합시스템 구축을 통한 방사능 비상사고 대응 및 국민안전 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '15 ～ '17 )					2단계 ( '18 ～ '19 )
- 방사성핵종 제염효율이 우수한 유용 식물체 확보 및 Lab 규모의 제염효율 평가 - 방사능제거 통합시스템 성능 및 제염효율 평가					- 방사능제염 통합 시스템 구축 및 field 적용 시험, 평가 - 제염효율 모델링 및 예측 시나리오 개발
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘15년도
• 방사성핵종 제염 유용 후보 식물체 탐색 및 선발 - 국내외 방사능오염 식물정화 현황 분석 및 자료수집 - 국내 자생식물체를 대상으로 한 유용후보식물체 탐색 및 후보식물체 선발 • 방사성핵종 제염 통합시스템 개념 수립 - 생물전기화학적 개념을 적용한 시스템 설계 및 장치 구성
‘16년도
• 방사성핵종 제염 유용 후보식물체 개발 - 방사선유도 돌연변이 기법을 이용한 Cs/Sr 저항성 돌연변이 후보식물체 개발 - 분자유전학적 기능분석 및 유용유전자원 확보/타 바이오산업 응용전략 검토 • 시스템 장치 수립, 성능시험 및 장치 업그레이드 - 시스템 장치 제작, 업그레이드 및 평가 - 생물학적 통합시스템 구성, 성능시험 및 Cs/Sr 거동 평가
‘17년도
• 방사성핵종 제염효율 평가 및 최종 유용 식물체 선발 - 확보된 후보식물체를 대상으로 한 Lab 규모의 소규모 성능평가 시험 - 방사성핵종 제염 최적화 식물체 개발 완료/타 바이오산업 응용전략 및 환경 적용전략 검토 • 방사능제거 통합시스템 구축 및 제염효율 평가 - 시스템에 적용한 방사성핵종 제염 식물의 근권생태계와 Cs/Sr 제염효율의 상관성 분석 - 예측 가능한 생물학적 및 환경적 요인에 의한 Cs/Sr 거동 평가
‘18년도
• 방사성핵종 제염 통합시스템 구축 및 성능평가 - 고효율의 Cs/Sr 제염이 가능한 소규모 생물학적 통합시스템 1조 구축 완료 - 시스템 성능평가 및 장치 업그레이드 • 선발된 식물체를 이용한 제염시나리오 구축 및 통합적 응용전략 수립 • 제염효율 예측 모델 및 시나리오 개발 - 방사성핵종 제염효율 평가기술 수립 및 최적화 모델 제시
‘19년도
• 방사성핵종 제염 통합시스템의 field 적용 시험 및 구축 완료 - field 시험단지 확보 및 생물학적 통합시스템 현장 적용 시험/시스템 성능평가 및 장치 업그레이드 - Lab 시스템과 field 시스템의 제염효율 비교를 통한 최적화 모델 제시 • 사고유형, 지리 및 환경조건 등에 따른 적용전략 수립 및 산업화를 위한 시스템의 통합 적용전략 수립 • 제염효율 예측 시나리오 개발 및 대응전략 수립 - 오염물질 및 오염강도에 따른 제염효율 예측 시뮬레이션 - 방사능 비상사고시 저감화기술 적용 시나리오 구축
■ 특기사항 • 총 5년(76.5억) : 15년(1.5억) / 16년(10억) / 17년(15억) / 18년(20억) / 19년(30억)