뇌영상 BT-IT(BIT) 융합 실용화 기술 개발

지원사업 추진계획(안)

□ 추진목표

○ 초고자장(7T 이상) 해부학적 진단기술과 고민감도 생화학적 진단기술을 결합한 융·복합 인체용 영상진단기기의 성능개선을 위한 기술을 개발하고, 이를 기술 이전하기 위한 실용화 기반 마련

□ 세부 사업목표

○ 뇌연구를 위한 초고자장 진단기기의 영상 획득 및 처리기술 개선

○ 초고자장 진단기기와 결합 가능한 고성능 생화학적 진단 검출기술 개선

○ 뇌질환의 영상진단 기술 개발

○ 해부학적-생화학적 진단기기를 결합한 융∙복합 초고자장 진단기기/기법 개발

○ 고기능 진단 기법, 고용량 데이터 획극 기법 등 실용화 기반 마련

□ 추진체계

□ 지원기간 및 투자계획

○ 지원기간 : 5년 지원 (1단계: 3년, 2단계: 2년)

○ 2014년 지원규모 : 10억원 내외

□ 사업내용 (추진내용)

연구목표	연구내용
7T MRI 시스템 개발 및 개량화 기술 개발	○ 7T MRI의 오픈플랫폼으로써의 개량을 위한 하드웨어적 성능 개선 연구 - 다핵종 (1H, 13C, 2H, 14N, 19F, 31P, 17O) 시스템 개발 - 초고해상도 다채널/다핵종 RF Coil 개발 - 전자장비 개발
7T MRI 분자영상 획득 및 영상 처리 기법 개발	○ 분자 영상 획득을 위한 MRI 시퀀스 및 영상 처리 기술 개발 - 다채널 및 다핵종 영상/분광 기법 연구 - 뇌 질환 조기진단에 특화된 영상기법 - 다핵종 영상처리 기술
PET/MRI 융합 영상 기술 개발	○ 융복합 영상기기로의 발전을 위한 호환용 PET 기술 개발 - 초고해상도 PET 개발 - 정밀도를 향상시킨 Fusion 영상 시스템 개발 - 비정시간 측정 기반 검출기 개발

□ 추진절차

① 추진계획 수립	ㅇ 미래부에서 추진계획 수립
↓
② 과 제 공 모	ㅇ 미래부 : 공고(안) 확정 ㅇ RFP내용 공고(미래부, NRF 홈페이지)
↓
③ 과 제 선 정	ㅇ 평가위원회에서 연구과제 선정평가 ㅇ 추진위원회에서 선정심의 ․ 확정
↓
④ 협 약	ㅇ 총괄협약 : MSIP↔NRF ㅇ 과제협약 : NRF↔주관연구기관
↓
⑤ 연구비 지급	ㅇ MSIP→NRF→주관연구기관
↓
⑥ 진 도 관 리	ㅇ NRF(전문위원) 점검 ㅇ 연차보고서/세미나 개최 등
↓
⑦ 연구결과 평가	ㅇ 단계 ․ 결과 평가 실시 ㅇ 공개발표를 통한 평가위원회 평가
↓
⑧ 연구비 정산 및 기술료 관리	ㅇ 연차별 연구비 정산 및 결과보고 ㅇ 기술료 징수 및 관리
↓
⑨ 성 과 관 리	ㅇ 연구개발결과의 활용실태 점검 ㅇ 우수연구개발 사례집 발간 ․ 배포 및 홍보
↓
⑩ 보 완 기 획	ㅇ 필요시 보완기획 및 단계종료후 기획 실시

□ 추진일정

○ 2014. 4월 : 신규과제 공고

○ 2014. 5월 : 연구계획서 접수 및 선정평가

○ 2014. 6월 : 협약체결 및 연구개시

		RFP번호	1
연구 분야	뇌영상 BT-IT(BIT) 융합 실용화 기술 개발
1. 연구목표
○ 최종목표 초고자장(7T 이상) 해부학적 진단기술과 고민감도 생화학적 진단기술을 결합한 융·복합 인체용 영상 진단기기의 성능개선을 위한 기술 개발 후 이를 기술 이전하기 위한 의료장비 국산화 및 실용화 기반 마련 ○ 1단계(2014~2016, 3년) - 뇌연구를 위한 초고자장 진단기기의 영상 획득 및 처리기술 개선 - 초고자장 진단기기와 결합 가능한 고성능 생화학적 진단 검출기술 개발 뇌질환의 영상진단 기술 개발 ○ 2단계(2017~2018, 2년) - 해부학적-생화학적 진단기기를 결합한 융·복합 초고자장 진단기기/기법 개발 - 고기능 진단 기법, 고용량 데이터 획득 기법 등 실용화 기반 마련
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2014~2016) ① 뇌연구를 위한 RF(Radio Frequency) 프로브 및 전자파 위해성 저감기술 개발 - 병렬 송·수신 RF 채널 회로 및 스마트 RF 제어기술 개발 - 다채널/다핵종 영상 획득 기법 및 영상 처리 기술 개발 ② 뇌영상진단을 위한 초고자장 진단기기 호환 생화학적 진단 검출기술 개발 - 반도체 기반 광센서 융·복합 진단기기 제작기술 개발(온도/인가전압 제어 기술 등) - 상용화된 생화학적 진단기기의 성능을 능가하는 고성능 시스템 개발 ③ 혈관성 및 퇴행성 뇌질환의 영상진단 기술 개발 - 고기능 진단기법 및 뇌신호 정보 처리를 위한 병렬 분산 처리기술 개발 - 임상연구를 위한 뇌영상 데이터베이스 구축 ○ 2단계(2017~2018) ① 초고자장 해부학적-생화학적 진단기기 결합 기술 개발 - 진단기기의 상호간섭 최소화 기술 개발 및 효율적인 결합 방법 연구 - 초고해상도 신호 획득시간 단축 및 영상 재구성 기술 확보 ② 혈관성 및 퇴행성 뇌질환의 질병진단 등 임상연구 연계 - 뇌질환의 삼차원 뇌조직 영상진단법, 미세신경/뇌 연결성 및 기능 뇌연결 지도 - 뇌질환 영상 데이터베이스 확보 및 병렬 분산 처리 기술 고도화
3. 특기사항
○ 본 사업은 5년(3+2)이며, 세부 과제수는 총괄 과제연구책임자가 RFP 상의 ‘연구내용 및 범위’를 고려하여 결정하며, 사업화 연계를 위한 연도별/단계별 세부계획을 제시할 것 ○ 단계 평가 후 계속지원 여부를 결정하고, 연구기간, 연구예산 및 내용은 변경될 수 있음 ○ 인간유래 시료를 이용하는 경우 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받아야 함 ○ 실제 임상적용을 위한 기술의 성공적인 개발을 위하여 MD-PhD 다학제 융합연구 방안 제시 ○ 사업화 목적에 부합하도록 병원 및 (중소)기업의 참여·협력계획 및 MOU 체결 방안 제시 ○ 의료기기 개발 추진과정에서 식약처(MFDS) 사전 승인 절차 준수 및 첨단의료기기개발지원센터와의 협력방안을 제시
4. 2014년 예산	10억원 내외