국립서울병원

학술연구용역사업 관리지침

2011

국 립 서 울 병 원

정신보건교육․연구센터

목 차

1. 개요	1

□ 목적	1

□ 적용범위	1

□ 학술연구용역사업 추진체계	2

□ 주관연구기관의 자격, 권한 및 의무	3

2. 수요조사	5

□ 연구과제 수요조사	5

3. 계획의 수립 및 연구과제 선정	5

□ 계획수립	5

□ 연구과제 심의‧평가	5

□ 연구과제 선정 및 공고	5

4. 주관연구기관 공모 및 접수	6

□ 주관연구기관 공모	6

□ 사업 제안서 접수	6

5. 주관연구기관의 평가 및 선정	6

□ 평가방법	6

□ 평가주체	7

□ 제안서 평가결과	7

6. 계약체결	8

□ 계약체결	8

□ 수의계약	8

7. 연구과제 관리	9

□ 연구계획 변경 신청 및 승인	9

□ 계획의 변경	9

□ 연구참여자 변경	10

□ 연구비 변경	10

□ 연구비 지급중단 및 회수	10

□ 행정제재에 대한 이의신청	11

8. 감독 및 진도관리	12

□ 감독	12

□ 진도보고서 제출	12

□ 진도평가	12

9. 검사	12

□ 연구결과 제출 및 평가	12

□ 연구결과 평가에 따른 조치	13

□ 검사	13

10. 연구결과 활용 및 사후관리	13

□ 연구보고서 배포	13

□ 연구결과활용	14

□ 연구결과의 권리 귀속	14

※ 별지 서식	15

1. 개요

□ 목적

학술연구용역사업의 공모, 공고된 과제에 대한 주관연구기관과 학술연구용역책임자(이하 “연구책임자”라 한다) 선정, 진도관리, 연구결과 평가 및 검사 등에 대하여 세부적인 사항을 정함으로써 평가업무의 객관성, 공정성, 투명성을 확보하고 효율적이고 신속한 학술연구용역사업의 시행을 목적으로 함

□ 적용범위

국립서울병원에서 시행되는 연구용역사업에 관련된 발주 및 관리부서(정신보건연구과), 계약부서(총무과 용도계), 주관연구기관 및 연구책임자는 본 지침을 준수하여야 함

□ 학술연구용역사업 추진체계

진행과정	수행주체	추진내용
연구과제 수요조사 실시	정신보건연구과	주요연구기관 대상 연구과제 수요조사 실시
⇓
연구과제 선정	기획평가위원회	연구과제 선정 및 공고요청
⇓
연구과제 공고․접수	총무과(용도)	연구과제 공고 및 접수
⇓
연구과제 심의․선정	기획평가위원회	연구제안서 심사 및 과제선정
⇓
연구과제 계약 체결	총무과(용도)	연구수행기관과 계약체결
⇓
연구 수행	주관기관	연구수행기관 연구진행
⇓
연구과제 진도관리	정신보건연구과(관리) 기획평가위원회(평가)	연구진도관리, 서면평가 및 구두평가(기간 중 1회 이상)
⇓
결과 평가	전문과제평가위원회	서면평가 및 구두평가
⇓
연구종료 및 정산	정신보건연구과	연구종료 및 연구비 정산
⇓
보고서 제출 배포	정신보건연구과	연구결과보고서 배포
⇓
연구결과 활용	정신보건연구과	정책자료 및 연구과제 개발시 활용 국가정신보건 수준 향상을 위한 연구결과 보급 관련 전문가 자료제공
⇓
연구성과 관리	정신보건연구과	정책반영, 논문발표, 실용화 등 실적 관리

* 주관연구기관이라 함은 선정된 연구과제에 대한 연구를 주관하여 수행하는 기관임

□ 주관연구기관의 자격, 권한 및 의무

주관연구기관의 자격

- 국·공립 연구기관 및 국·공립병원(보건소포함. 단, 예산 및 기금운용계획 집행지침에 의거, 보건복지부 및 산하 내부공무원, 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원과는 용역계약을 체결할 수 없음)

- 교육법에 의한 대학 또는 전문대학

- 정부출연연구기관등의설립․운영및육성에관한법률에 의한 연구기관

- 기술개발촉진법에 의한 기업부설연구소

- 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합

- 기타 법령에 정하는 동 연구 분야 연구기관 및 단체 또는 기업

주관연구기관의 권한과 의무

- 연구과제 수행 및 종합적인 관리에 관한 사항

- 연구과제 계약체결에 관한 사항

- 연구과제의 수행에 필요한 연구인력, 시설 및 행정지원에 관한 사항

- 기타 연구과제의 수행에 필요한 사항

연구책임자의 자격 및 신청제한

- 연구책임자는 주관연구기관에 소속된 ‘정규 연구인력□이어야 하며 비정규직일 경우, 연구책임자의 임용계약기간은 반드시 전체연구기간인 총 연구기간보다 길어야 함(※「연구기관별 연구인력 해당 기준표」참조)

- 연구책임자는 당해 연도 연구기간 중 3/4이상 국내에 거주해야 하며 단, 과제수행 중 해당과제와 관련하여 연구수행을 목적으로 1/4이상 국외출장 계획이 있는 연구책임자는 출국 1개월 전까지 관리기관의 승인을 받아야 함

- 타 부처 연구사업 수행 중에 연구사업 참여제한 요청이 없는 연구자

- 보건복지부 및 산하 내부공무원, 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원은 연구사업에 참여제한

연구책임자 권한 및 의무

- 연구과제 계획서 및 중간진도보고서, 결과보고서 작성에 관한 사항

- 연구과제 수행과정의 조정 및 감독에 관한 사항

- 기타 연구과제의 수행에 필요한 사항

연구기관별 연구인력 해당 기준표

연구기관	책 임 연 구 원	연 구 원	연구보조원	보조원
대 학	1.부교수 이상 2.박사학위 소지자 로서 대학부설 연구기관 7년이상	1.전임강사 이상 2.박사학위 소지자 로서 대학부설 연구기관 근무자	1.대학원 박사과정 재학생 2.학사학위 소지자 로서 대학부설 연구기관 6년이상	1.대학원 석사과정 재학생 이하
국공립의료기관 및 부설 연구소소유 민간의료기관	1.의사, 치과의사 및 한의사 면허 소지자 면허취득후 12년 이상	1.의사, 치과의사 및 한의사 면허 소지자로서 면허취득후 7년 이상	1.의사, 치과의사 및 한의사 면허 소지자로서 면허 취득후 2년 이상	1.의사, 치과의사 및 한의사 면허소지자 및 비의료인 연구자
국/공립 연 구 소	1.연구직 과장 또는연구관 5년이상 2.기술직 4급 이상 3.정부출연연구소의 책임급 연구원	1.연구관 2.기술직 5급 3.정부출연연구소의 선임급 연구원 4.박사학위 소지자로서 국공립연구소에 근무하는 연구사	1.연구사 2.기술직 6급이하 3.정부출연연구소의 석사급 연구원	1.정부출연연구소의 학사급 연구원
정부투자기관 및 민간기업체	1.학사학위소지자로서 전공분야 연구경력 12년 이상 2.박사학위 또는 기술사 취득 후 5년 이상	1.학사학위소지자로서 전공분야 연구경력 6년 이상 2.박사학위 또는 기술사 취득후 1년이상	1.학사학위소지자로서 전공분야 연구경력 1년 이상	1.학사학위이하소지자

1) 각 연구기관별 자격기준 중 어느 한 가지에 해당하면 인정

2) 대학병원의 경우 반드시 대학의 기준을 적용하여야 함

2. 수요조사

□ 연구과제 수요조사

학술연구용역사업 과제선정을 위한 과제제안서 수요조사 실시

주요 연구기관을 대상으로 수요조사를 실시하여 조사결과를 분석하여 차년도 과제선정 자료 제공(별지 제1호 서식)

3. 계획의 수립 및 연구과제 선정

□ 계획수립

정신보건연구과는 차년도 학술연구용역사업에 대한 계획을 수립

□ 연구과제 심의‧평가

정신보건연구과는 연구과제를 심사함에 있어 정부에서 실시하고 있는 연구사업 중에서 유사하거나 동일한 연구가 수행 또는 신청되었는지 여부를 확인하여야하며, 타 연구사업에서 수행하고 있는 연구과제와의 중복성이 인정되는 경우 선정대상 과제에서 제외 할 수 있음

□ 연구과제 선정 및 공고

평가위원의 평가회의를 통해 연구과제를 선정하고 선정된 내용에 따라 총무과(용도계)는 국립서울병원 홈페이지 등에 공고함(별지 제2호 서식)

4. 주관연구기관 공모 및 접수

□ 주관연구기관 공모

주관연구기관의 선정은 공모를 통한 공개경쟁을 원칙으로 하며 과제제안서를 공고하여 다수의 연구기관이 연구사업신청서를 제출하여 참여할 수 있도록 함

2개 기관 이상의 유효한 응모기관이 없을 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다.) 제 20조에 의거 재공고를 시행함

※ 이때 사업 기간을 제외하고는 최초 공모안에 제시된 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없음

□ 사업 제안서 접수

학술연구용역과제 수행자로 응모하는 연구기관은 연구기관장 및 연구책임자의 직인이 포함된 학술연구용역사업신청서를 총무과(용도계)로 제출함

접수된 사업신청서(사업제안서)는 공고 마감일로부터 20일 이내에 평가를 실시함

접수된 사업신청서(사업제안서)가 보건복지부 또는 타 부처 지원으로 연구내용 및 연구방법이 동일한 과제가 수행 중에 있는 경우 연구참여를 제한할 수 있음

5. 주관연구기관의 평가 및 선정

□ 평가방법

주관연구기관의 사업신청서(사업제안서)에 대한 평가는 기술평가를 원칙으로 하지만 평가항목에 연구비의 적정성 항목을 포함하여 검토함

평가항목은 아주우수, 우수, 보통, 미흡, 불량의 5단계로 구분하여 항목의 비중에 따라 10~15점을 배점으로 하여 총 100점을 만점으로 함. 평가표의 평가항목 및 점수배점은 연구과제 성격에 따라 변형하여 사용할 수 있음(별지 제 4호 서식)

평가위원의 평가결과를 합산하여 최고점과 최저점을 제외한 산술평균으로 등급을 결정하며, 70점 미만인 경우 선정에서 제외함

재공모 후에도 1개의 연구기관이 응모할 경우, 응모한 기관에 대한 평가를 실시함

□ 평가주체

주관기관(정신보건연구과), 기획평가위원회

기획평가위원회 구성

- 기획평가위원회는 해당분야 내‧외부 전문가로 해당 연구과제의 규모, 성격 등에 따라 평가위원장을 포함한 6인 이상의 원내․외 전문가로 구성함

기획평가위원회의 자격

- 외부평가위원은 대학, 연구소 등의 조교수, 선임연구원이상 해당분야 전문가로 하며, 내부평가위원은 해당연구분야에서 3년 이상 연구개발경력이 있는 국립서울병원의 직원으로 함

기획평가위원회의 기능

- 학술연구용역사업의 우선순위 선정에 관한 사항

- 연구과제의 선정⦁관리⦁평가에 관한 사항

- 연구비 반환 조치에 관한 사항

- 연구결과 평가 수행을 위한「전문과제평가위원회」선정‧위촉

- 기타 학술연구용역사업 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

※ 「국립서울병원 학술연구용역사업 기획평가위원회 운영규정」 참조

□ 제안서 평가결과

정신보건연구과는 평가위원의 의견서를 참조하여 과업내용서를 작성하여 총무과(용도계)에 제출함

총무과(용도계)는 통보받은 결과를 근거로 사업수행기관과 계약을 체결함

총무과(용도계)는 계약체결 결과를 계약체결 즉시 정신보건연구과에 통보함

6. 계약체결

□ 계약체결

연구계획서와 연구비내역에 대한 공모 심사․평가과정을 거친 연구사업에 대하여는 총무과(용도계) 계약담당공무원이 가능한 조정된 금액으로 계약을 체결하나, 예정 가격 작성시 재조정 필요하다고 판단될 경우 재조정하여 계약체결함

계약체결시 필요한 서류

- 사업계획서(결재문서사본 포함)

- 용역계약특수조건(학술및전산용역사업편람 Ⅱ-1항, Ⅲ-1항)

⋅용역표준계약서, 용역입찰유의서(Ⅰ-8항), 용역계약일반조건(Ⅰ-9항)의 내용 이외에 필요한 사항

※ 보건복지부「학술 및 전산용역 사업편람(2009)」에 따름

- 산출내역서: 당해 학술연구용역사업비의 구체적인 비목별 산출내역(별첨2-다호)

※ 산출내역 작성 시 <별첨 2> 학술용역사업비 산출기준의‘비목별 산출기준’에 따라 작성하며, 자산취득비는 계상할 수 없음 예) 컴퓨터 등의 장비, 책 등

- 기초내역서: 산출내역에 대한 세부항목별 필요성, 인원, 수량 및 가격 등에 대한 산출근거(별첨2-라호)

- 과업내용서(별지 제5호 서식)

- 수의계약사유서(수의계약인 경우에 한함, Ⅰ-10항)

- 용역계약요청서(수의계약인 경우에 한함)

□ 수의계약

연구과제에 대한 공모는 공개경쟁을 원칙으로 하나, 다음 각호의 경우 수의계약을 할 수 있음

- 계속사업으로서 기존연구기관과의 계약이 필요한 경우

- 전문분야의 제한성 등으로 특정연구기관과의 계약이 불가피한 사업

- 공모하여서는 사업추진이 곤란한 사업

- 기타 필요한 사유가 인정되는 사업

7. 연구과제 관리

□ 연구계획 변경 신청 및 승인

연구책임자는 연구내용, 연구기간, 연구비내역변경, 연구책임자 및 참여연구원 변경 등 연구계획을 변경하고자 할 경우 계약기간 내에 정신보건연구과를 통하여 국립서울병원에 연구계획변경을 신청하고 승인을 받아야 함

□ 계획의 변경

과제명 변경

- 연구과제 수행 중 과제명 변경은 원칙적으로 불허함

연구기간 등 변경

- 정신보건연구과는 효율적인 사업수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 계약일반조건 16조의 처리규정에 따라 다음 각호의 과업내용을 요청하여 연구책임자에게 지시할 수 있음

- 추가업무 및 특별업무의 수행

- 연구계획의 변경

- 특정용역항목의 삭제 또는 감소

정신보건연구과는 계획의 변경 등으로 인하여 과업내용을 변경하여야 하는 사유가 발생하는 때에는 연구책임자에게 즉시 변경을 신청하도록 조치함

□ 연구참여자 변경

연구책임자의 변경은 원칙적으로 불허함. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우에 한하여 주관연구기관장을 통하여 신청 후 국립서울병원장의 승인을 받아야 함

- 사망한 때 또는 불구 폐질이 된 때

- 연구기간 중 재임용 탈락 등으로 연구를 수행하지 못할 때

- 소속 변경 또는 보직 변경으로 연구를 수행할 수 없을 때

- 기타 질병, 실종, 형사소추 등 부득이한 사유로 인하여 연구를 계속 수행할 수 없을 때

참여연구원 변경은 당초 계약된 인건비 내에서 주관연구기관장의 승인으로 변경할 수 있으며 변경사항을 국립서울병원에 통보하여야 함(별지 제6호 서식)

□ 연구비 변경

연구비 변경신청은 사업종료 20일전까지 승인을 받아야 함

직접비(일반관리비 제외) 각 항목의 20%이하의 금액일 경우 국립서울병원의 승인 없이 항목별 전용이 가능함. 단 전용사유서를 작성하여 전용이 발생하였음을 통보하여야 함

직접비 각 항목의 20%이상의 금액에 대한 변경 신청은 국립서울병원에 사유서를 제출하여 승인을 받아야 함

□ 연구비 지급중단 및 회수

연구자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 국립서울병원은 해당 연구자의 연구과제 수행을 중단시킬 수 있으며, 이 경우 주관연구기관 또는 연구책임자는 국립서울병원이 결정하는 바에 따라 지급된 연구비의 전부 또는 일부를 국립서울병원에 반납하여야 함

1. 연구비를 지급목적에 위반하여 사용하거나 부당하게 집행하였을 경우

2. 허위 기타 부정행위에 의하여 연구비를 지급 받은 경우

3. 연구진행 상황보고를 하지 아니하거나 허위로 한 경우

4. 연구결과발표물이 표절 또는 허위로 판정될 경우

5. 연구결과보고를 당초 연구기간 종료 후 보고기한을 이행하지 않았을 경우

6. 본부 및 타 기관 등에서 동일과제로 연구비를 이중 지원 받았을 경우

7. 연구책임자가 연구수행 중 국립서울병원이 정한 의무사항을 준수하지 않았을 경우

8. 주관연구기관 혹은 연구책임자의 귀책사유로 연구수행을 포기한 경우

9. 학술연구용역 계약 대상이 아닌 기관으로 이직하여 당초 연구비 지급의 목적이 달성 될 수 없다고 인정될 경우

10. 기타 더 이상 연구를 수행할 수 없다고 객관적으로 판단될 경우

○ 연구비 정산 결과 연구비의 부당집행이 인정된 경우 주관연구기관은 연구책임자가 부당집행금액 전부를 반납하도록 조치함

□ 행정제재에 대한 이의신청

연구비의 지급중단 또는 회수를 통보받았을 경우 통보일로부터 15일 이내에 소명서를 제출할 수 있으며, 이 경우 국립서울병원은 소명의 타당성을 심의할 수 있음. 단 정해진 기일 내에 소명서를 제출하지 않을 경우 이의가 없는 것으로 간주함

연구책임자는 연구결과보고서 평가결과 미흡, 불량 등급을 받은 경우 통보일로부터 15일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이 경우 국립서울병원은 자체평가 및 재심사를 실시할 수 있음. 단, 정해진 기일 내에 소명서를 제출하지 않을 경우 이의가 없는 것으로 간주함

연구책임자가 장기해외출장 등 부득이한 사유로 제재 관련 내용을 통보 받지 못한 경우에는 통보사실 확인이 가능한 것으로 판단되는 날로부터 15일이내에 이의를 제기할 수 있음

8. 감독 및 연구진도 관리

□ 감독

정신보건연구과는 국가계약법 제13조에 따라 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 계약서 등 관계서류에 의하여 감독을 실시하여야 함

감독결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 국립서울병원장의 승인을 받아 협약을 해약할 수 있음

□ 진도보고서 제출

연구책임자는 연구수행 기간의 50% 경과 후부터 1개월 이내에 진도보고서를 작성하여 정신보건연구과에 제출하여야 함(기간 중 1회 이상)(별지 제7호 서식)

□ 진도평가

정신보건연구과는 연구책임자에게 진도평가를 위한 구두발표를 실시하게 하며, 연구책임자는 발표 시 지적된 사항을 연구과제에 반영하여야 함

평가위원은 진도평가서에 의하여 연구수행의 타당성, 연구수행 및 결과의 완성도 예상, 예산운영의 적정성 등의 평가 항목에 따라 평가함

정신보건연구과는 필요한 경우 연구결과에 대한 중간세미나, 공청회, 전문가 회의 등의 개최를 주관연구기관에 요구할 수 있음

9. 검사

□ 연구결과 제출 및 평가

연구책임자는 연구 종료 시 까지 다음 각 호의 내용을 첨부하여 국립서울병원에 제출함

- 학술연구용역결과보고서(별지 제10호 서식)

- 학술연구용역사업비 사용실적보고서

- 기타 부서가 지정하는 사항

연구결과의 평가는 연구기간 종료 1개월 전에 각 과제별「전문과제평가위원회」를 활용하여 ‘구두평가’를 실시하고, 연구책임자는 발표 시 지적된 사항을 결과보고서에 반영하여야 함

□ 연구결과 평가에 따른 조치

평가결과가 미흡 이하 등급을 받았을 경우 과제 제재 조치 실시

등급결정 미흡이하의 과제에 대하여 차기 년도 연구 과제 참여 제한

평가 결과 등에 따라 결과보고서의 보완이 필요할 경우, 연구책임자에게 보고서 수정을 요청하고, 연구책임자는 수정요청일로부터 14일 이내에 수정된 최종보고서를 국립서울병원에 제출함

□ 검사

정신보건연구과는 연구책임자로부터 보고서 및 용역사업비 사용실적보고서 등이 접수된 후 14일 이내에 다음 각 호의 내용에 대한 검사를 실시함

- 용역결과보고서가 계약내용대로 완료되었는지 여부

- 계약내역과 집행내역의 적절성 여부 : 계약특수조건 제6조, 제11조에 따른 증액집행 여부

정신보건연구과는 검사를 완료한 후 주관연구기관에 검사결과를 통보하고 사업비 잔액을 청구하도록 조치 함

10. 연구결과 활용 및 사후관리

□ 연구보고서 배포

연구과제 수행 결과 얻어진 연구보고서의 판권 등 일체의 권리는 국립서울병원의 소유로 함

□ 연구결과활용

지원기관, 주관연구기관 및 참여연구원 등이 연구결과에 대해서 학회(지) 발표 등 공개발표 시에는 지원기관의 책임하에 동 연구사업이 국립서울병원 학술연구용역사업으로 수행된 사업임을 명시하여 발표하되, 중요한 사항에 대해서는 사전에 국립서울병원장과 협의하여야 함. 또한 학회(지)등 발표 사실을 정신보건연구과에 통보하여야 함(별지 제15호 서식)

- 국문표기시 : “이 논문 또는 저서는 20  년 국립서울병원의 재원으로 국립정신보건교육․연구센터의 지원을 받아 수행된 연구임(과제번호)”

- 영문표기시 : “This study was supported by a grant from the National Center for Mental Health Research & Education, the Seoul National Hospital, Republic of Korea(과제번호)"

정신보건연구과는 개발된 연구과제에 대하여 주관연구기관(연구책임자)으로 하여금 향후 3년간 활용실적 및 최종 성과물을 제출 받아 관리하여야 함

- 활용실적이 우수한 연구책임자에 대해서는 포상 및 차기 연구계획서 심사 시 가산점 부과 등의 인센티브 제공

□ 연구결과의 권리 귀속

본 연구사업을 통한 연구결과의 권리는 국립서울병원장에 귀속

※ 첨부자료  1. 별지 제1호 ~ 별지 제16호

2. <별첨1> 국립서울병원 학술연구용역사업 계획서

3. <별첨2> 학술용역사업비 산출기준(산출내역서 및 기초내역서 서식 포함)

4. <별첨3> 청렴계약 이행서약서

※ 별지 서식 목록

1. <별지 제1호 서식> 학술연구용역사업 과제제안서

2. <별지 제2호 서식> 학술연구용역사업 공고문

3. <별지 제3호 서식> 학술연구용역사업 시행계획

4. <별지 제4호 서식> 학술연구용역사업 심사평가표

5. <별지 제5호 서식> 과업내용서

6. <별지 제6호 서식> 참여연구원변경요청(통보)서

7. <별지 제7호 서식> 학술연구용역사업 진도보고서

8. <별지 제8호 서식> 학술연구용역사업 진도평가표

9. <별지 제9호 서식> 학술연구용역사업 진도평가 주관부서 의견

10. <별지 제10호 서식> 학술연구용역사업 최종결과보고서

11. < 별지 제11호 서식> 학술연구용역사업 최종평가서

12. <별지 제12호 서식> 학술연구용역사업 최종평가 의견

13. <별지 제13호 서식> 학술연구용역사업 검사조서

14. <별지 제14호 서식> 학술연구용역사업 결과보고서 제출 확인서

15. <별지 제15호 서식> 학술연구용역사업 학술대회(학술지) 발표 통보서

16. <별지 제16호 서식> 이의신청서

<별지 제1호 서식> 학술연구용역사업 과제제안서

성 명		소 속
직 위		E-mail
연 락 처	사무실 : 핸드폰 :
연구주제	① 알코올 ( )		② 자살예방 ( )
	③ 정신질환예방 및 관리 ( )		④ 정신건강증진 ( )
	⑤ 기타 정신보건정책 관련 ( )
연구과제명
주요 연구내용	○연구의 필요성, 목표, 주요내용 등을 간략히 기재
연구기간	개월
소요예산	천원

<별지 제2호 서식> 학술연구용역사업 공고문

국립서울병원 공고 제201  -    호

201  년도 국립서울병원 학술연구용역사업을 실시하기 위하여 다음과

같이 연구기관을 공모하오니 전문연구기관의 적극적인 참여를 바랍니다.

201   년    월    일

국 립 서 울 병 원 장

1. 연구용역사업 과제

사 업 과	과 제 명	주요연구내용	연구기간(월)	예산액(천원)
○○○ 과 (전화: )

※ 연구과제별 세부내용은 국립서울병원 홈페이지(www.snmh.go.kr)에 게시합니다.

2. 신청자격

가. 국·공립 연구기관 및 국·공립병원(보건소포함. 단, 예산 및 기금운용계획 집행지침에 의거, 보건복지부 및 산하 내부공무원, 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원과는 용역계약을 체결할 수 없음)

나. 교육법에 의한 대학 또는 전문대학

다. 정부출연연구기관등의설립․운영및육성에관한법률에 의한 연구기관

라. 기술개발촉진법에 의한 기업부설연구소

마. 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합

바. 기타 법령에 정하는 동 연구 분야 연구기관 및 단체 또는 기업

3. 연구기관 선정

가. 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)

나. 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원회를 통해 신청서 심사 ․ 평가 후 국립서울병원 홈페이지에 게시 및 개별 통보

4. 제출서류

○ 학술연구용역사업 신청 공문 1부(응모기관장 발행)

○ 제본된 신청서 10부

- 1부는 반드시 주관연구책임자 자필서명(인)과 주관연구기관 직인이 찍힌 원본을 제출하여야 함

○ 내용수록 CD 1개

※ 첨부한 “학술연구용역사업 신청서”에 내용 작성

5. 서류접수 일정

가. 학술용역사업 신청서 접수

○ 기  간 : 201 .   .   ~   .    까지

○ 장  소 : 국립서울병원 총무과(용도)

나. 접수방법 : 직접접수 또는 우편(등기)접수

(단, 우편접수의 경우 접수마감일까지 도착분에 한하고 토요일, 일요일은 방문접수 불가)

☞ 우편발송 주소 : (143-711) 서울특별시 광진구 중곡3동 30-1번지

국립서울병원 총무과(용도계)

6. 기타사항

가. 응시자 주의사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하며, 추후 허위사실이 발견될 때에는 선정을 취소.

나. 문의사항

○ 접수 등의 일반문의 : 총무과(용도) ☎ 02-2204-0125

○ 용역사업 내용문의 : 정신보건연구과 담당자 ☎ 02-2204-0293

☞ 주요 교통편 : 지하철 7호선 중곡역 하차, 1번 출구에서 좌측방향으로 걸어서 5분 소요

<별지 제3호 서식> 학술연구용역사업 시행계획

201 년도 학술연구용역사업 시행계획

Ⅰ. 사업개요

1. 목적

○ 정신보건 분야 연구사업의 발굴‧지원을 통하여 정신질환을 예방, 관리하고, 정신건강증진 관련 정책 및 프로그램을 개발‧적용하는 등 국민의 보건복지 및 삶의 질 향상에 기여하고자 함

‘05년부터 정신건강증진, 정신질환예방 및 관리를 위한 연구를 발굴하여 지원하고 있음

2. 추진방향

3. 201 년도 지원내용

사업과	과제명	연구비	연구기간	과제제안서
정신보건 연구과

4. 사업추진절차

진행과정	수행주체	추진내용
연구과제 수요조사 실시	정신보건연구과	주요연구기관 대상 연구과제 수요조사 실시
⇓
연구과제 선정	기획평가위원회	연구과제 선정 및 공고요청
⇓
연구과제 공고․접수	총무과(용도)	연구과제 공고 및 접수
⇓
연구과제 심의․선정	기획평가위원회	연구제안서 심사 및 과제선정
⇓
연구과제 계약 체결	총무과(용도)	연구수행기관과 계약체결
⇓
연구 수행	수행기관	연구수행기관 연구진행
⇓
연구 진도관리 및 평가	정신보건연구과(관리) 기획평가위원회 및 전문과제평가위원회(평가)	연구 진도관리 및 진도보고서를 통한 평가(서명평가 및 구두평가)
⇓
결과 평가	전문과제평가위원회	서면평가 및 구두평가
⇓
연구종료 및 정산	정신보건연구과	연구종료 및 연구비 정산
⇓
보고서 제출 배포	정신보건연구과	연구결과보고서 배포
⇓
연구결과 활용	정신보건연구과	정책자료 및 연구과제 개발시 활용 국가정신보건 수준 향상을 위한 연구결과 보급 관련 전문가 자료제공
⇓
연구성과 관리	정신보건연구과	정책반영, 논문발표, 실용화 등 실적 관리

Ⅱ. 연구과제 신청요건 및 방법

1. 신청자격

가. 연구기관의 자격

○ 국·공립 연구기관 및 국·공립병원(보건소포함. 단, 예산 및 기금운용계획 집행지침에 의거, 보건복지부 및 산하 내부공무원, 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원과는 용역계약을 체결할 수 없음)

○ 교육법에 의한 대학 또는 전문대학

○ 정부출연연구기관등의설립․운영및육성에관한법률에 의한 연구기관

○ 기술개발촉진법에 의한 기업부설연구소

○ 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합

○ 기타 법령에 정하는 동 연구 분야 연구기관 및 단체 또는 기업

나. 연구책임자의 자격

○ 연구책임자는 주관연구기관에 소속된 ‘정규 연구인력’이어야 하며 비정규직일 경우, 연구책임자의 임용계약기간은 반드시 전체연구기간인 총 연구기간보다 길어야 함

※연구기관별 책임연구원, 연구원의 기준은〈별표1. 연구기관별 연구인력 기준표〉참조

○ 연구책임자는 당해 연도 연구기간 중 3/4이상 국내에 거주해야 하며 단, 과제수행 중 해당과제와 관련하여 연구수행을 목적으로 1/4이상 국외출장 계획이 있는 연구책임자는 출국 1개월 전까지 관리기관의 승인을 받아야 함

○ 타 부처 연구사업 수행 중에 연구사업 참여제한 요청이 없는 연구자

다. 신청제한

○ 보건복지부 또는 타부처 지원으로 연구내용 및 연구방법이 신청과제와 동일한 과제가 수행 중에 있는 경우

○ 보건복지부 및 산하 내부공무원, 국립서울병원 학술연구용역 기획평가위원은 연구 사업에 참여제한

2. 신청방법

가. 접수기간 : 201 .  .    ~  201 .  .

나. 제출기한 : 201 .  .   까지

다. 제출방법 : 직접방문, 우편(등기) 접수

※우편 접수는 당일 도착분만 인정, 토요일, 일요일은 방문접수 불가

라. 제출서류

○ 학술연구용역사업 신청 공문 1부(응모기관장 발행)

○ 제본된 신청서 10부(원본 포함)

- 1부는 반드시 주관연구책임자 자필서명(인)과 주관연구기관 직인이 찍힌 원본을 제출하여야 함

○ 내용수록 CD  1개

접수 및 문의처

◦ 접수장소 : (143-711) 서울특별시 광진구 중곡 3동 30-1

국립서울병원 총무과(용도계)

◦ 홈페이지 :

www.snmh.go.kr

◦ 문    의 : 접수관련 문의 (02)2204-0124～5

연구용역사업 내용 문의 (02)2204-0293

3. 참고사항

○ 접수된 서류는 일체 반환하지 않음

○ 제반사항은 보건복지부 「학술 및 전산용역사업편람(2009)」및「국립서울병원 학술연구용역 관리지침」에 따름

Ⅲ. 평가 및 관리체계

1. 평가개요

○평가기간 : 201 .  .  ～  201 .  .

○평가단계 : 사전심사 → 종합평가

2. 1단계 사전 심사

○평가목적 : 자격 및 과제의 적합성 심사

○평가내용 : 연구기관 및 연구책임자의 자격, 참여제한 여부, 중복신청 여부, RFP와의 부합성

3. 2단계 종합 평가

○평가목적 : 연구계획의 우수성 및 과제구성의 적합성 등

○평가방법 : 1단계 사전심사 결과에 대한 평가위원을 구성하여 서면평가 등 종합평가 실시

○평가단 : 관련 전문가 7인으로 구성된 기획평가위원회

○종합평가결과를 토대로 지원과제 및 지원연구비 최종 확정

○평가항목 및 평가기준

심사결과 우선순위에 따라 과제수행자 선정

구분	평 가 항 목	배점
연구과제	1. 연구내용이 요구부서가 필요로 하는 사항을 충족하고 있는가?	15
	2. 연구방법이 타당한가?	10
	3. 연구목표 달성의 가능성은 어떠한가?	10
	4. 연구결과의 활용 및 파급효과는 어느 정도인가?	10
연구자	5. 연구경력에 비추어 연구책임자가 연구를 성공적으로 수행할 수 있는가?	15
	6. 연구의 효율적 수행을 위해 연구팀이 적합하게 구성되어 있는가?	15
연구기간	7. 연구내용 및 방법 등을 고려할 때 연구수행 일정은 적절하게 계획되었는가?	10
연구비	8. 연구내용, 방법 및 연구기간 등을 고려 할 때 연구비의 책정은 합리적인가?	15
합 계		100

4. 연구과제 관리

가. 연구비 관리

○연구비 지급 : 보건복지부 학술 및 전산용역사업편람 학술용역계약에 의거, 국립서울병원이 주관연구기관에 연구비를 지급함

○연구비 사용 : 연구책임자의 발의에 의해 연구비 비목별 계상기준과 연구계획에 의거 사용하여야 함

○연구비 관리 : 주관연구기관의 장이 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 관리하여야 함

○연구계획의 변경 : 주관연구기관의 장은 당초 연구계획을 변경하고자 할 때에는 국립서울병원장의 사전 승인을 받아야 함

연구내용의 중대한 변경(연구목표, 연구기간, 공동연구원 변경, 주관연구책임자 소속변경 등)

연구비 집행계획의 변경(직접비 각 항목의 20%이상의 금액에 대한 변경 신청은 국립서울병원에 사유서를 제출하여 승인을 받아야 함)

나. 진도보고

○연구수행 기간의 50% 경과 후부터 1개월 이내에 연구진행에 관한 진도보고서 제출

○서면평가 및 구두평가 시행(연구기간 중 1회 이상)

다. 결과보고

○연구종료일로부터 1개월 이내에 연구결과 발표회를 개최, 전문과제평가위원의 의견수렴을 거친 후 최종보고서 제출

Ⅳ. 추진일정

○ 201 .  .  ~ 201 .  .      학술연구용역사업 공고 및 접수

○ 201 .  .  ~ 201 .  .      과제평가실시

○ 201 .  .                 선정결과통보

○ 201 .  .  ~ 201 .  .      계약체결

※ 재공고시 연장될 수 있음

<별지 제4호 서식> 학술연구용역사업 심사평가표

학술연구용역기관 심사 평가표

▢ 과제명 :

▢ 응모기관 :

심사자 성명 :		서 명 :

구 분	평 가 항 목	배 점	평가결과(“○”) 표시
			아주 우수	우수	보통	미흡	불량
연 구 과 제 (45)	1. 연구내용이 요구부서가 필요로 하는 사항을 충족하고 있는가?	15	15	13	11	9	7
	2. 연구방법이 타당한가?	10	10	8	6	4	2
	3. 연구목표 달성의 가능성은 어떠한가?	10	10	8	6	4	2
	4. 연구결과의 활용 및 파급효과는 어느 정도인가?	10	10	8	6	4	2
연 구 자 (30)	5. 연구경력에 비추어 연구책임자가 연구를 성공적으로 수행할 수 있는가?	15	15	14	13	12	11
	6. 연구의 효율적 수행을 위해 연구팀이 적합하게 구성되어 있는가?	15	15	14	13	12	11
연구기간 (10)	7. 연구내용 및 방법 등을 고려할 때 연구수행 일정은 적절하게 계획되었는가?	10	10	9	8	7	6
연구비 (15)	8. 연구내용, 방법 및 연구기간 등을 고려할 때 연구비의 책정은 합리적인가?	15	15	14	13	12	11
합 계		100

심사자 의 견

※ 총점

※  1. 성명 및 서명란에 반드시 자필로 기재해주시기 바랍니다.

2. 표기는 해당란에 ○표시로 하시고, 빈 칸(합계 및 총점)에는 표기하지 마십시오.

3. 정정시에는 반드시 서명하여 주시기 바랍니다.

<별지 제5호 서식> 과업내용서

과  업  내  용  서

□□□□□□□□□□□□□□□□

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
1. 사 업 명 2. 목적 및 필요성 3. 사업기간 4. 사업수행체계 5. 사업내용 가. “세부사업내용” 나. 다. 6. 추진방법 7. 사업관리 가. 추진일정 나. 보고서 등 제출 8. 기대효과 및 활용방안 9. 기 타 가. 지원내용 나. 기 타	- 해당용역사업의 명칭 - 해당용역사업이 달성하고자하는 목표, 방향 - 사업에 소요되는 기간 - 사업추진과 관련된 기관의 역할과 책임, 업무의 흐름 등을 기술 - 과업내용서의 가장 중요부분으로 조사, 평가 연구, 회의 등 세부사업내용으로 구분하여 과업내용, 조사계획 등을 구체적으로 기술 - 세부사업별 추진일정을 기술 - 필요한 보고서 등 산출물의 제출시기, 내용과 수량을 기술 - 사업과 관련 교육 등 계약상대자로부터의 추가지원이 필요한 사항 기술

<별지 제6호 서식> 참여연구원변경요청(통보)서

참여연구원변경요청(통보)서

과제번호
과제명
연구기관						연구책임자
변경 전				변경 후
성명	참여기간		인건비 수령여부	성명	참여기간		인건비 수령여부		변경사유

※ 각 세부과제별로 작성 후 사용실적보고서 제출 시 함께 제출

※ 인건비 수령 여부란에 수령인은 ○ 표기할 것

※ 참여연구원 변경요청시 각 기관의 참여연구원 변경 공문 함께 첨부

※ 연구원보조원 및 보조원 변경은 주관연구기관장의 승인후 통보함

<별지 제7호 서식> 학술연구용역사업 진도보고서

<국립서울병원 학술연구용역사업 진도보고서>

연구과제명	국문
	영문
수행 연구기관	기관명(부서명)		소재지	대 표
연구책임자	성 명		소속 및 부서	전 공
연 구 기 간
연 구 비	일금 천원정 (￦ )
참여연구원	명 (책임연구원: , 연구원:, 연구보조원: 보조원: )
201 년도 국립서울병원 학술연구용역사업에 의하여 수행중인 연구과제의 진도보고서를 붙임과 함께 제출합니다. 붙임 : 1. 국립서울병원 학술연구용역사업 진도보고서 10부 2. 진도보고서 수록 파일 1부 201 년 월 일 주관연구책임자(연구책임자) (인 또는 서명) 주관연구기관장(수행부서의장) (직인) 국립서울병원장 귀하

가. 연구수행내용

※ 그동안 수행한 결과를 5페이지로 작성

나. 연구의 진척도

※ 당초 계획서상의 진도계획과 비교하여 간략하게 작성

다. 연구수행에 따른 문제점 및 개선방향

※ 당초계획보다 진도상의 미흡한 부분에 대한 원인과 대책 등을 기술

라. 연구비 집행내역

비 목 명	당초 연구개발비	사용액	집행잔액
인건비
경비
일반관리비
계

마. 주요 연구변경사항

※ 해당되는 경우 연구의 목표, 연구책임자 등 중요협약변경사항을 간략히 기술

바. 기타 건의사항

※ 각 항목별 여백이 부족할 경우 별지 이용하여 작성

<별지 제8호 서식> 학술연구용역사업 진도평가표

주관부서 연구진도 평가

※과제번호
연구제목
연구책임자		소 속
연구기간			연구비	천원

평가항목	평가내용				비고
	매우 적절함	적절함	적절하지 않음	매우 부적절
당초 연구방향 및 목표(RFP)와의 적절성 여부
연구의 진척정도 (당초 연구일정대비)
주관부서 요구사항 반영도
정책 활용도

종합의견		※ 해당사항에 √하시고, 구체적인 의견을 기술하여 주십시오.
1. 계속 연구를 진행함이 적절함			( )
2. 연구내용의 수정 또는 보완이 요구됨			( )
3. 연구의 중단 또는 전면적 재검토가 요구됨			( )
4. 기타			( )
	의견기술(주관부서 요구사항)

<별지 제9호 서식> 학술연구용역사업 진도평가 주관부서 의견

진도관리 주관부서 의견

※ 과제번호
연구제목
연구책임자		소 속
연구기간			연구비

주관부서 의견

<별지 제10호 서식> 학술연구용역사업 최종결과보고서

편집순서 1 : 겉표지

(뒷면)                                 (측면)                              (앞면)

↑

5 ㎝

↓

과

제

명

2

0

1

0

국립정신보건교육 ․ 연구센터	국립서울병원	주관연구기관명

↑

3 ㎝

↓

↕ 2cm

↔

2cm

발간등록번호

(중고딕, 12point)

연구과제명 (국문)

(견명조, 18point)

연구과제명 (영문)

(휴먼명조, 15point)

주관연구기관명

국립서울병원

국립정신보건교육․연구센터

(16point, 견명조)

↑

5 ㎝

↓

(11 Point, 돋움)

*)과제고유번호 지정

(뒷면)

1. 이 보고서는 국립정신보건교육․연구센터에서 지원한 용역연구개발사업의 최종보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 국립정신보건교육․연구센터에서 지원한 용역연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 이 보고서에 수록된 내용은 연구자 개인적인 의견이며 국립정신보건교육․연구센터의 공식견해가 아님을 밝혀둡니다.

(11 Point, 돋움)

↑

6 ㎝

↓

편집순서 2 : 제출문

제    출    문

국립정신보건교육․연구센터장   귀  하

이 보고서를 “ 연구과제명(주관연구기관명/주관연구책임자) ”과제의 최종보고서로 제출합니다.

201 .   .

주관연구기관명 :  ○ ○ ○ ○ ○

연 구 책 임 자 :  ○ ○ ○

연    구    원 :  ○ ○ ○

연    구    원 :  ○ ○ ○

연    구    원 :  ○ ○ ○

편집순서 3 : 요약문

최종보고서 요약문

○ 연구사업의 목적, 연구방법, 연구결과, 기대효과를 한글로 요약하여 2쪽 이내의 분량으로 작성할 것.

연구과제명
중심단어
주관연구기관		주관연구책임자
연구기간	년 월 ～ 년 월

편집순서 4 : 요약문(영문)

Summary

○ 연구사업의 목적, 연구방법, 연구결과, 기대효과를 영문으로 요약하여 2쪽 이내의 분량으로 작성할 것.

Title of Project
Key Words
Institute		Project Leader
Project Period	201 . . - 201 . .

작성 및 제출 요령

1. 겉표지 작성 요령

1) 연구과제명은 과제선정당시의 국문과제명과 영문과제명을 기재함.

2. 일반 작성 요령

1) 아래에 설명되어 있는 내용에 따라 순차적으로 작성하며, 서론, 연구내용 및 방법, 연구결과, 결론 및 제언 등으로 구분하여 체계적인 형식을 갖추도록 함.

2) 반드시 편집순서에 따라 작성하여야 함.

3) 요약문은 연구목적, 연구방법 및 결과, 기대효과 등을 중심으로 작성함.

4) 요약문 중 중심단어(key words)는 5개 이내로 반드시 기재해야 함.

5) 번호나 기호를 사용한 보고서 형태로 작성하고 표나 그림을 이용할 수 있음. 단, 제본된 「최종보고서」와 함께 제출하는 전산파일에도 같은 표와 그림이 첨부되어 있어야 함

3. 편집순서

표지

제출문

요약문

Summary(영문요약)

목차

․목 차

․표 목차

․그림 목차

본문

뒷면지

4. 보고서 작성 요령

1) 순서는 가급적 장, 절, 1, 가, 1), 가), ①, ㉮ 등으로 유지하되,

장 : hwp 18 point 중고딕

절 : hwp 16 point 중고딕

1 : hwp 13 point 중고딕

가 : hwp 12 point 중고딕

본문 : hwp 11 point 휴면명조로 한다.

2) ‘장’은 원칙적으로 페이지를 바꾸어 시작한다.

3) 글자모양은 장평 95, 낱말간격(자간) 5, 줄간격 170%로 한다.

4) 문단모양은 문단아래 5.0pt 간격을 주며, 본문은 3칸 들여쓰기로 시작한다(제목 제외).

5) 페이지번호는 하단 중앙아래 hwp(휴면명조) 10 point로 한다.

6) 각주는 해당 페이지 하단에 hwp(휴면명조) 10 point로 표기하며, 본문과 구분토록 한다.

7) 그림과 표

① 반드시 ‘제목’을 상단에 명기하도록 하며, hwp 11 point 중고딕, 줄간격 130%로 한다.

② ‘단위’ 표시는 hwp(휴먼명조) 10 point 로 하며, 줄간격 130%로 한다.

③ 표 안의 내용은 hwp(휴먼명조) 10 point 이하로 한다.

④ 표, 그림의 출처는 아래 예시와 같이 하단에 반드시 명기하도록 한다.

※ 예시

〈표 4-1〉 알코올 상담센터 전문직종별 현황

(단위: 명)

	총계	정신과 전문의	정신과 전공의	정신보건전문요원			간호사	사회 복지사	임상 심리사	간호 조무사
				간호사	사회복지사	임상심리사
2004년	55	1	0	16	16	5	4	12	1	0
2005년	65	1	0	22	22	3	5	11	1	0

자료 : 중앙정신보건사업지원단(2006), 2005년 중앙정신보건사업지원단 사업보고서, 중앙정신보건사업지원단(2005), 2004년 중앙정신보건사업지원단 사업보고서

9) 참고문헌(Reference) 인용의 경우 본문 중에 사용처를 명기한다.

5. 인쇄 및 제본 방법

1) 인쇄규격

① 크기 : B5

② 본문 글자 크기는 11 point(표, 그림, 제목 제외)로 양면인쇄

③ 제본 : 좌철(스프링 철 또는 스테플러 등은 사용하지 않아야 함)

④ 용지 : 표지- 200g/m, 양면 아트지, 무광

내용- 80g/m, 모조지, 미색

⑤ 인쇄방식 : 흑색 지정활자로 인쇄함

2) 본 서식 중 좌상단의 ‘편집순서’ 네모상자와 서식 내 회색 네모상자의 안내문 등 필요하지 않은 내용은 모두 삭제한 후 최종보고서를 제본하여야 함.

6. 최종보고서 제출 사항

1) 주관부서의견 반영사항 최종보고서 작성 전 사전검토 확인 후 인쇄요망

2) 제출 서류 :

‘최종보고서’ 90부 및 CD 1매

주관연구기관 제출공문 1부

- 연구의 기여도 및 결과 활용계획을 포함한 연구요약문(15쪽 이내) 1부

3) 제출 기한 :

4) 제출 장소 : 서울시 광진구 중곡 3동 30-1번지 국립서울병원

국립정신보건교육‧센터 정신보건연구과 박세진(우편번호 143-711)

전화 : 02-2204-0293, 팩스 : 02-2204-0280

<별지 제11호 서식> 학술연구용역사업 최종평가서

국립서울병원 학술용역 연구과제 최종평가서

사 업 명	학술용역연구사업
평 가 유 형	서면( ) 구두( )
연구과제명
주관연구책임자		주관연구기관

위 과제의 최종보고서에 대하여 다음과 같이 평가합니다.

본인은 위 연구과제 또는 연구책임자와 관련이 없으며 평가내용에 대한 비밀을 유지하겠습니다. 또한 연구책임자와 상의 없이 연구내용을 사용․공개하지 않을 것을 확약합니다.

201 년    월    일

평가자    소속 :

성명 :	(자필서명 또는 인)

다음과 같은 사유로 인하여 위 과제의 최종보고서에 대한 평가를 포기합니다.

사유 :                                      (자필서명 또는 인)

국립정신보건교육․연구센터장 귀하

Ⅰ. 평가항목

※ 해당란에 “○”표 하여 주시고, 정정 시에는 반드시 날인하여 주십시오.

평가 항목	평가 내용	소계	가중치	매우 그렇다		↔	전혀 그렇지 않다
				5	4	3	2	1
목표 달성도 (30)	연구결과의 목표달성 수준 ▶ 계획된 목표대비 최종결과의 일치성 또는 변경시 적절성		3
	연구수행 과정의 적절성 ▶ 추진체계 및 전략이 계획에 따라 효율적으로 수행되었는가?		3
연구개발결과의 우수성 (30)	연구개발결과의 타당성 ▶ 연구개발내용 및 결과의 타당성이 확보되었는가?		3
	연구개발결과의 질적 수준 ▶ 연구개발결과물이 질적으로 우수한가?		3
연구 결과의 파급효과 및 기여도 (40)	연구개발결과의 정책적 활용계획 ▶ 연구개발결과의 정책적 활용계획이 우수하고 실현가능한가?		5
	공공적 파급효과 및 기여도 ▶ 연구결과가 국민 정신건강증진, 예방 등 공공적 기여도가 높은가?		3
계		( 점)/100점

평가자 서명

Ⅱ. 종합의견

※ 평가결과에 대한 구체적인 의견을 기술하여 주십시오.

평가자  서명

<별지 제12호 서식> 학술연구용역사업 최종평가 의견

평가위원회 의견

※ 과제번호
연구제목
연구책임자		소 속
연구기간			연구비	천원

종합 의견

※ 연구기관에서는 평가위원회 의견에 대한 답변 첨부(자유서식)와 최종결과보고서를 수정하여 우리 원 주관부서로 먼저 송부, 확인바랍니다(e-mail :).

제안부서명 : 국립서울병원 학술연구용역사업 기획평가위원회

위원장            (인)

<별지 제13호 서식> 학술연구용역사업 검사조서

학술연구용역사업 검사조서

과 제 명
연 구 기 간	년 월 ~ 월
연 구 비	천원
주 관 기 관		과제책임자

201 년 우리 원에서  월 ~  월까지 실시한 학술연구용역사업에 대하여 연구비 집행실적 및 결과를 검사한 결과 계약서 등의 내용대로 연구가 수행․완료되었음을 확인합니다.

201 년    월    일

확인자 :                     (인)

<별지 제14호 서식> 학술연구용역사업 결과보고서 제출 확인서

결과보고서 제출 확인서

과 제 명
연 구 기 간	단년도( ) 계속( )		년 월 ~ 월
연 구 비	천원	수행방법	자체( ) 용역( )
			단독( ) 공동( )
주 관 기 관		과제책임자
확 인 내 용
기술용역표준계약서에 의거, 계약내용에 따라 연구결과보고서가 년 월 일 까지 주관부서로 보고되었음을 확인합니다. 주관부서의 결과보고서 검사조서에 따른 행정처리를 하여 주시기 바랍니다. 최종확인일자 : 년 월 일 최종확인자 : (인)

국립서울병원 국립정신보건교육․연구센터

정신보건연구과

<별지 제15호 서식> 학술연구용역사업 학술대회(학술지) 발표 통보서

학술대회(학술지)발표 통보서

20    .     .     .

발표제목
사업명
과제명
발 표 자	소속: 직급: 성명:
연구책임자	소속: 직급: 성명:
학 회 명 (학술지명)
발표(게재) 일자
발표장소 (국명포함)
발표요지

첨부 : 논문 또는 초록1부.

<별지 제16호 서식> 이의신청서

이의신청서

사업명
과제번호
과제명
주관연구책임자 (성명/소속)
연구비
연구기간
사 유

상기과제의 평가결과에 대하여 위와 같이 이의를 신청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

201   년    월    일

주관연구책임자 :                 (인)

주관연구기관장 :                 (인)

국립서울병원장 귀하

<별첨1>      국립서울병원 학술연구용역사업 신청서

연구과제명	국 문
	영 문
책임연구원 (연구총괄책임자)	소속기관		직 위				전화번호
	성명(한문)		전 공				F A X
	담당과목		세부전공
연 구 기 간	년 월 - 년 월 ( 년 개월)		연구형태		문헌( ), 조사( ), 실험( )
					단독( ), 공동( )
연구참여자	연구원 (책임연구원 제외)		명		연구보조원	명
연 구 비	신 청 액
	자비 및 기타
본인은 붙임연구를 수행하고자 연구용역을 신청하며, 연구용역이 결정될 경우 귀 기관에서 정한 제반사항을 준수하여 충분한 연구성과를 거둘 것을 서약합니다. 년 월 일 책임연구원 (인)
붙 임 1. 연구참여자 인적사항 2. 연구분담표 3. 연구계획서
위의 신청자는 재능이 우수하고 연구의욕이 왕성하여 소기의 연구성과를 거둘 수 있다고 인정되었기에 귀 부의 연구용역 대상으로 추천하며, 선정되는 경우 소정의 기관 책무를 이행하겠습니다. 년 월 일 소속기관장 인 국 립 서 울 병 원 장 귀하

1. 연구참여자 인적사항

가. 책임연구원

(1) 인적사항

소 속				직 위
성 명		(한자)
주민등록번호			전 화		사무실 : (교)
					자 택 :
학력	기 간		학 교		전 공		학 위		비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
경력	기 간		기 관			직 위		비 고
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월
	년 월 - 년 월

(2) 연구수주 실적 총괄  (최근  5년간)

연 구 비 수혜실적	수 행 중 인 연 구 과 제	저 서		연 구 논 문 발 표
		국 외	국 내	외국학술지	국내학회지	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

(3) 연구비 수주실적  (최근  5년간)

구분	역 할 (책임연구원, 연 구 원)	연구과제명	연 구 비		연 구 기 간 (부터-까지)	논 문 발 표 학 술 지 명
			금 액 (단위: 천원)	지 원 기 관
발표
수행중인과제

(4) 저서실적 (최근  5년간)

발행년도	저 서 명	츨 판 사	발 행 지 (국내, 국외)	비 고

(5) 연구논문 발표실적  (최근  5년간)

연 구 과 제 명	연 구 기 간 (부터 - 까지)	연구 논문 발표지 명 (발표년월)	역할 (책 임 자, 연 구 원)	연 구 비 지 원 기 관

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내순으로 기재하여 주십시오.

(가) 석. 박사 지도현황 및 실적

구 분	전 년 지 도 현 황	배 출 실 적	비 고
석 사
박 사

(나) 수행중 및 수행예정 내용

구 분	과 제 명	지 원 기 관	연 구 비	기 간 (부터- 까지)	역 할 (책임연구원 또는 연구원)

(다) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타기관에 신청하였을 경우

신청 대상기관	연 구 기 간	참 여 역 할	신 청 연 구 비

나. 연구원

(1) 연구원(갑)

성 명	(한자)			생 년 월 일
소 속		직 위			전 공

○ 학력사항

기 간	학 교	전 공	학 위

○ 주요경력

기 간	기 관	분 야	직 책

(2) 연구원(을)

성 명	(한자)			생 년 월 일
소 속		직 위			전 공

○ 학력사항

기 간	학 교	전 공	학 위

○ 주요경력

기 간	기 관	분 야	직 책

(3) 연구원(병)

성 명	(한자)			생 년 월 일
소 속		직 위			전 공

○ 학력사항

기 간	학 교	전 공	학 위

○ 주요경력

기 간	기 관	분 야	직 책

* 연구원 및 연구보조원이 4인 이상일 경우에는 복사하여 추가로 기재하시기 바랍니다.

다. 연구보조원

소 속	직 위	성 명	생년월일	최종 출신학교	학 위	비 고

라. 보조원

소 속	직 위	성 명	생년월일	최종 출신학교	학 위	비 고

마. 연구원들의 연구실적

연 구 자	역할 (책임자, 연구원)	연 구 과 제 명	연 구 기 간 (부터 - 까지)	논 문 발 표 학 술 지 명	연 구 비 지원기관 (년 도)

* 연구논문 발표학술지는 국외, 국내순으로 기재하여 주십시오

2. 연구분담표

분 담 내 용	책임연구원 및 연구원			연 구 보 조 원
	소 속	직 위	성 명	소 속	직 위	성 명

3. 연구계획서

가. 연구목적 및 필요성

○ 수행하고자 하는 연구과제와 관련되는 국내외 정책현황 등에 대해 기술하고 연구의 필요성을 구체적으로 기술

나. 연구수행체계

다. 연구내용 및 방법

(1) 연구내용

○ 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술

(2) 연구방법

○ 연구과제의 목표달성을 위하여 적용하고자 하는 방법론(접근방법) 등을 구체적으로 기술

라. 국내외 연구동향(연구배경)

○ 국내외 정책동향, 연구동향 등 연구의 배경을 기술

마. 연구결과에 대한 기여도, 기대효과 및 활용방안

(1) 기대효과

○ 연구자 입장에서 기대되는 결과를 정책적 · 기술적 측면에서 구체적으로 기술

(2) 활용방안

○ 예상되는 활용분야 및 활용방안을 상세히 기술

바. 공동연구로 수행해야 할 필요성

○ 전문가초청 활용 등 공동연구 수행의 필요성을 기술

사. 참고문헌

아. 전문가 초청활용

구분	세부연구 내 용	성 명	국 명	소속 및 직 위	전공 및 학위	초청활용 기 간	활용내용	소용경비 (천원)	재 원

* 구분란에는 국내·국외로 구분하여 기재

* 전문가 초청 활용계획이 없는 과제는 작성 불요

자. 주요 연구기자재 및 시설

연구기자재 및 연구시설명	규 격	수 량	용 도	보유현황	확보 및 활용방안	비 고

* “보유현황”란에는 당해 연구개발수행기관을 포함한 보유기관의 기관명을 기재

** “확보 및 활용방안”란에는 구입, 임차 등을 기재하며, 구입 혹은 임차연도를 비고란에 기재

*** 기자재 활용 계획이 없는 과제는 작성 불요

차. 연구추진일정

구 분	월 별 추 진 일 정												비 고
연 구 내 용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
추 진 진 도 ( % )

카. 연구용역 사업비

( 단위 : 원 )

비 목 구 분	금 액	구 성 비	비 고
ㅇ 인 건 비 소 계
책 임 연 구 원 연 구 원 연 구 보 조 원 보 조 원
ㅇ 경 비 소 계
여 비 유 인 물 비 전 산 처 리 비 시 약 및 연 구 용 재 료 비 회 의 비 임 차 료 교 통 통 신 비 감 가 상 각 비
일 반 관 리 비 ( )% 이 윤 ( )%
ㅇ 계

● 별첨2> 의 학술용역사업비 산출기준을 참고하여 작성

● ‘세부산출내역서’ 및 ‘기초내역서’ 작성 제출

※ 별첨2>의 비복별 산출기준에 따라 구체적으로 작성하시기 바랍니다.

<별첨2>         학술용역사업비 산출기준

가. 적용법령

○ 예정가격 작성준칙

○ 공무원여비규정

○ 예산편성기준

○ 조달청 인쇄기준요금

나. 일반기준

○ 비목별 적용범위와 기준이내에서 계상하되 동 범위를 초과하여 구분란의 세목을 추가하거나 단가를 변경하여야 할 경우에는 기초내역서에 그 사유와 근거를 명시

○ 비목별 구분란의 세목은 그 품명(인쇄물명, 물품명 등)과 규격(크기, 회사명 및 카타로그번호 등)을 막연하거나 “기타” 등으로 기재하지 말고 구체적으로 기재

○ 비목별 산출기준에 단가표시가 없는 물품의 단가는 공인기관의 가격정보지의 가격을 확인 적용하고 근거를 첨부

○  일반적으로 상품화되지 아니한 품명, 외부컴퓨터 사용료, 임차료, 시약

○ 계약상대자가 적용법령에 해당되는 사실을 구체적으로 기재및 연구용 재료비 등에 대하여는 견적서 등 가격근거를 첨부

다. 산출내역서

산 출 내 역 서

1. 인 건 비			소 계													원
○ 책임연구원	2,724,727원		참여율			(%)	×		1인			×		월			=	원
○ 연 구 원	2,089,283원		참여율			(%)	×		인			×		월			=	원
○ 연구보조원	1,396,617원		참여율			(%)	×		인			×		월			=	원
○ 보 조 원	1,047,499원		참여율			(%)	×		인			×		월			=	원
※ 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과할 수 없음.
2. 여 비			계													원
< 국내여비 >			소 계													원
○ 책임연구원	숙 박	숙박비	46,000원			1인		×		일			×		회		=	원
		일비등	51,400원			1인		×		일			×		회		=	원
	비숙박	일비등	51,400원			1인		×		일			×		회		=	원
○ 연 구 원	숙 박	숙박비	30,000원			인		×		일			×		회		=	원
		일비등	45,800원			인		×		일			×		회		=	원
	비숙박	일비등	45,800원			인		×		일			×		회		=	원
○ 연구보조원	숙 박	숙박비	30,000원			인		×		일			×		회		=	원
		일비등	42,900원			인		×		일			×		회		=	원
	비숙박	일비등	42,900원			인		×		일			×		회		=	원
< 국외여비 >			소 계													원
○ 책임연구원	숙박비	단가				×	1인			×	일				회		=	원
	일식비	단가				×	1인			×	일				회		=	원
	항공료	단가				×	1인			×	2회				회		=	원
3. 유인물비			소 계													원
○ 보고서				단가		×	부										=	원
○ 회의자료				단가		×	부										=	원
○ 설문지				단가		×	부										=	원
○ 문헌복사		30~40원				×	면										=	원

4. 전산처리비				소 계											원
○ 컴퓨터사용료				실소요 단가			×			수량						=	원
○ 전산용지(상자)				단가	17,000		×			상자						=	원
○ 프린터토너(개)				단가	140,000		×			개						=	원
5. 시약 및 연구용 재료비				소 계										원
○ 내 역 첨 부
6. 회 의 비				소 계											원
○ 자문회의		수당	70,000～100,000원		×	인		×			회					=	원
		경비	10,000원		×	인		×			회					=	원
○ 토론회, 공청회
수당	(특강,좌장,주제발표자)			100,000～ 200,000원					×				인			=	원
수당	(위이외의 자)			70,000～130,000원					×				인			=	원
경비	(리셉션)			10,000원					×				인			=	원
경비	(다과회)			2,000원					×				인			=	원
7. 임 차 료				소 계											원
○ 품 명(규격)			단가		×	수량		×				기간				인	원
○ 회의 장소명			단가					×				일				인	원
8. 교통통신비				소 계											원
○ 시내교통비		10,000～20,000원			×	인		×				월				=	원
○ 전화사용료		10,000원			×	인		×				월				=	원
○ 우편료		30,000원						×				월				=	원
9. 일반관리비				소 계											원
○ 제1항 부터 제9항의 합계액 × 5%이내																=	원
1~9항 사업비 총계																원

라. 비목별 산출기준

비목별 산출기준

비 목	산 출 기 준
1) 인건비 가. 적용기준
	구 분			자 격				역 할							단 가
	책임연구원			부교수 수준				․1인을 원칙으로 하되, 용역 성격상 다수의 책임자 필요시 예외							2,724,727
	연 구 원			대학조교수 수준				․책임연구원 보조							2,089,283
	연구보조원			대학 조교 수준				․통계처리, 번역 등							1,396,617
	보 조 원							․타자, 계산, 원고정리 등							1,047,499
	※ 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우 기준단가를 증감시킬 수 있다. ※ 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과할 수 없음.
2) 여 비 <국내여비> 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 출장을 실시하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 시외여비만을 월 15일이내 계상 ○ 시내여비는 8)교통통신비에 계상 ○ 운임은 <공무원여비규정>에 따른 실비로 지급
	구 분	숙박비				일 비 등
						일비	식비			소계
	책임연구원 연 구 원 연구보조원	46,000 30,000 30,000				20,000 20,000 20,000	25,000 20,000 20,000			45,000 40,000 40,000			․ 2․3급, 대학의 교수, 부교수, 전문대의 교수 ․ 4․5급, 대학의 조교수․전강, 전문대의 부․조교수 ․ 기 타
<국외여비> 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 국외출장을 실시하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 1인에 한하여 계상
	구 분		등급		항공운임				일비		숙박료	식비		비 고
	책임연구원 연 구 원		가나다라가나다라		․ 2등급기준 ․실소요운임				35 35 35 35 30 30 30 30		166 120 92 79 145 95 70 62	107 78 58 49 81 59 44 37		․환율은 요구시점의 “매매기준율”적용

비 목	산 출 기 준
<국외여비> 다. 국가 및 도시별등급
	등급	국가 및 도시
	가	동경, 뉴욕, 런던, 로스엔젤레스, 모스크바, 샌프란시스코, 워싱턴, 파리, 홍콩
	나	○ 아시아주ㆍ대양주：대만, 북경, 싱가포르, 우즈베키스탄, 인도, 일본 ○ 남ㆍ북아메리카주：멕시코, 미국, 브라질, 세이셀, 세인트루시아, 세인트킷츠네비츠, 아르헨티나, 아이티, 자메이카, 캐나다 ○ 유럽주：네덜란드, 노르웨이, 덴마크, 독일, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아이슬란드, 영국, 오스트리아, 우크라이나, 이탈리아, 체코, 프랑스, 핀란드, 헝가리 ○ 중동ㆍ아프리카주：가봉, 남아프리카공화국, 수단, 아랍에미리트, 오만, 우간다, 코트디브와르, 콩고민주공화국, 쿠웨이트
	다	○ 아시아주ㆍ대양주：뉴질랜드, 마샬군도, 말레이시아, 방글라데시, 베트남, 브루나이, 아제르바이잔, 필리핀, 오스트레일리아, 인도네시아, 중국, 카자흐스탄, 키르키스탄, 태국, 터키, 파키스탄, 파푸아뉴기니 ○ 남ㆍ북아메리카주：가이아나, 나카라과, 도미니카공화국, 바베이도스, 벨리즈, 세인트빈센트, 안티구아바부다, 우루과이, 칠레, 코스타리카, 트리니다드토바고, 파나마 ○ 유럽주：그리스, 리투아니아, 불가리아, 아일랜드, 알바니아, 유고슬라비아, 포루투갈, 폴란드 ○ 중동ㆍ아프리카주：니제르, 라이베리아, 리비아, 모리시어스, 모잠비크, 바레인, 보츠와나, 부르키나파소, 사우디아라비아, 상토메프린시페, 시에라리온, 요르단, 이란, 이스라엘, 이집트, 중앙아프리카, 카메룬, 카타르, 케냐, 탄자니아
	라	○ 아시아주ㆍ대양주：네팔, 라오스, 마이크로네시아, 몽골, 미얀마, 스리랑카, 캄보디아, 피지 ○ 남ㆍ북아메리카주：과테말라, 베네수엘라, 볼리비아, 수리남, 에쿠아도르, 엘살바도르, 콜롬비아, 파라과이, 페루 ○ 유럽주：몰도바, 보스니아-헤르체코비나, 에스토니아, 크로아티아 ○ 중동ㆍ아프리카주：가나, 감비아, 기네비스, 기니, 나미비아, 나이지리아, 레바논, 레소토, 르완다, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모로코, 모리타니아, 세네갈, 소말리아, 스와질랜드, 알제리, 예멘, 이디오피아, 이라크, 잠비아, 짐바브웨, 튀니지
		※ 국가 및 도시별 등급구분에 없는 국가는 출장지에서 위의 국가의 수도까지의 거리가 가장 가까운 국가의 등급을 적용

비 목	산 출 기 준
3) 유인물비 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비 (지대 포함)
	구 분		단 가						비 고
	보 고 서 회의자료 설문지 문헌복사비		조달청인쇄기준요금 〃 〃 30～40원						․인쇄물의 경우 구체적인 인쇄내역과 크기 예상면수를 기재 ․문헌복사비에는 복사용지대포함 ․유인물이외의 사무용품, 슬라이드 등은 일반관리비에서 활용 ․“기타” 등으로 막연하게 구분하는 경우 미인정
4) 전산처리비 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 부대 비용 ○ 각각의 기준수량외의 사용은 연구계획서상에 초과사유를 기재하여야 함
	구 분				기준		단 가				비 고
	컴퓨터사용료 전산용지 프린터 토너				1월：2상자 분기：1개		실소요금액 17,000 140,000				․컴퓨터 사용료는 외부컴퓨터를 사용하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상하되 견적서 등 근거서류를 첨부 ․물품명 등 구체적인 명칭과 규격을 기재 ․기타 당해연구와 관련된 자료처리를 위한 비용은 구체적 사유와 규격을 기재하고 막연하게 구분하는 경우 미인정 ․연구원 10인이상은 1.5가산
5) 시약 및 연구용 재료비 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 실험실습에 필요한 당해 비용 ○ 산출내역서에는 합계액만 기재, 세부내역은 아래서식에 따라 별지로 작성하여 첨부함. ○ 견적서 등 가격근거를 첨부함. ○ 실험실습이 포함되지 않은 연구사업의 경우, 단순아르바이트 및 일용 직인건비, 조사 및 검진 사례비 등을 본 비목에 계상할 수 있음(단, 이에 따른 근거자료 및 사유를 반드시 기초산출내역서상에 기재하여야 함)
		품 명		규 격		단위		수량		단가		금 액	비 고
		합 계

비 목	산 출 기 준
6) 회의비 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 외부인사, 전문가를 초청하는데 소요되는 경비 ○ 내부연구원은 회의수당 계상 불가
	구 분		단 가		비 고
	자문회의 수당 경비		2시간까지： 70,000 2시간초과：100,000 1인당： 10,000		․내부연구원 제외, 초청 인원수대로 계상 ․회의참석 인원수대로 계상
	토론회, 공청회 - 수당 ․특강, 좌장, 주제발표자 ․위 이외의 자		1시간까지：100,000 2시간까지：150,000 2시간초과：200,000 1시간까지： 70,000 2시간까지：100,000 2시간초과：130,000
	- 경비 ․다과회 ․리셉션		1인당： 2,000 1인당：10,000		․다과회를 기본으로 계상 하고 리셉션경비는 불가피한 경우에 한하여 계상
7) 임 차 료 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 공청회 등을 위한 회의장 사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상 ○ 실소요금액
8) 교통통신비 가. 적용범위 나. 적용기준	○ 당해 연구내용과 직접관련된 시내교통비, 전신전화사용료,우편료
	구 분	단 가		비 고
	시내교통비 전화사용료 우 편 료	4시간이상：20,000 4시간미만：10,000 참여연구원 1인당 10,000이하로 하되 1월당 70,000이하 1월당 30,000이하		․설문조사를 우편으로 실시하는 경우 추가계상
9) 일반관리비	○ 제1항부터 제9항의 합계액 × 5%이내(연구비 총액의 4.75%이내)

라. 기초내역서

기 초 내 역 서

1. 인 건 비

○ 필요성

- 연구원 구분(책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원)별로 연구 참여인원의 내역과 참여사유 등을 설명

○ 연구원 명단

구 분	소 속	직 위	성 명	수 행 업 무	연구참여율
				당해 연구사업에서 수행하는 업무내용을 기재	%

2. 여  비

가. 국내출장

○ 필요성

- 출장의 목적 및 사유를 설명

○ 출장내용

- 조사대상별 출장자(연구원 구분), 출장기간 등 업무내용을 설명

조사구분	조사대상 및 수량	연구원 구 분	인원	기간	회수	업무내용	비 고
			인	○박○일

나. 국외출장

○ 필요성

- 국외출장의 목적 및 국외출장을 하지 않고는 연구목적을 달성할 수 없는 사유를 설명

○ 출장내용

- 출장자, 출장기간, 출장국가(지역), 출장하여 수행하는 조사내용, 자료수집내용 등 업무내용을 설명

연구원 구 분	인원	기간	회수	출장 지역·기관	업무내용	비 고
	인	○박○일

3. 유인물비

○ 필요성

○ 산출근거

- 보고서, 회의자료 등 인쇄물별로 규격(A4, B5 등), 예상면수, 수량, 수량의 산출근거를 기재

인쇄물명	규격	예상면수	수량 (부수)	수량산출근거 (배부내역)	비 고

4. 전산처리비

○ 필요성

- 전산처리의 내용과 사유를 설명

○ 산출근거

- 일반적인 전산소모품이외의 프로그램개발, 입력 등 전산처리수량에 대한 산출근거와 가격근거 제시

5. 시약 및 재료비

○ 필요성

- 시약 및 재료비의 필요사유를 설명

○ 내  용

- 수량에 대한 산출내역을 제시하고 관련업체의 견적서 등 가격근거자료 첨부

6. 회의비

○ 필요성

- 자문회의, 공청회 등 외부인사, 전문가를 초청하여 실시하는 회의의 목적과 사유를 설명

○ 회의내용

- 회의별 회의내용, 참석범위, 참석인원 등 기재

회의구분	회의내용	참석범위 및 인원	소요시간	비 고
		초청인원수와 내부연구원수를 구별하여 기재

7. 임차료

○ 필요성

- 임차 목적과 사유를 설명

○  임차내용

- 임차대상물품․장소, 규격, 수량, 임차기간 등을 기재

임차물품․장소	규격	수량	임차기간	비 고

8. 교통통신비

○ 일반적인 시내출장, 전화요금, 우편료 이외 설문조사를 우편으로 실시하는 등 특이사항이 있는 경우 그 필요성과 내용을 설명

<별첨 3>             청렴계약 이행서약서

당사(대학 및 대학원)는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 금번 국립서울병원이 실시하고자 하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하여 귀 국립서울병원이 발주하는『       과 제 명         』용역계약과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 지켜 이행할 것을 서약합니다.

서  약  내  용

1. 위의 사업과 관련하여 계약 제반계약사항을 성실히 이행할 것이며, 계약 사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 계약 체결과 이행 등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물공여나 청탁으로 관계 공무원을 회유하여 편의를 제공받는 등 불법을 묵인하도록 요청하지 않겠으며, 관계 공무원의 어떠한 불법․부당 요구에도 단호히 이를 거부하겠습니다.

3. 위의 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따른 처분은 물론 귀 국립서울병원이 발주하는 모든 공사․기술용역․물품 등에 대하여 참가 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 스스로 참가하지 않겠으며, 이와 관련 귀 국립서울병원의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

20   년    월     일

서약자 :  기관명              대표          (인)

국립서울병원 재무관 귀하