			RFP번호	1
연구 분야	뇌연구를 위한 차세대 의료영상시스템 개발 및 기반구축
1. 연구목표
○ 인체 뇌과학 연구 가능 극초고자장(EHF) 자기공명영상시스템(14T MRI System) 개발 및 관련 원천기술 확보 ○ 뇌과학과 뇌질환 부문 연구설비 및 연구기반 구축
2. 연구내용 및 범위
○ 14T MRI 시스템 설계 연구개발 - 14T MRI용 초전도 마그넷 시스템 구축 - 14T MRI 영상 획득용 고성능 제반 전자장치 연구개발 및 설계 - 14T MRI 대용량 데이터 처리를 위한 고속 컴퓨팅 시스템 구축 - 다핵종 영상이 가능한 시스템 구축 ○ 14T MRI 시스템 설치 및 연구시설 구축 - 14T MRI 시스템 관련 장비 구축 - 14T MRI 시스템의 연구 공간 구축 ○ 14T MRI 시스템의 물리적,생물학적,생리학적 인체안전성 및 생체적합성 실험/연구 - 동물에서의 생체 영향 및 안전성 연구 - 인체 안전성 연구 - 안전성 평가 기술 개발 ○ 14T MRI 시스템 영상기법 및 영상처리 기술 개발 - 영상 획득(Acquisition) 기법 - 영상 재구성(Reconstruction) 기술 - 영상 처리(Post-Processing) 기술 - 영상 정량화(Quantification) 기술 - 고속 영상 획득 및 처리(Algorithm) 기술 - 다핵종 영상 획득 및 처리 기술 ○ 14T MRI 시스템 응용 연구 - 뇌과학 및 뇌질환의 비임상 연구 - 뇌과학 및 뇌질환의 응용 연구 - 다핵종 자기공명 영상기법을 이용한 연구
3. 특기 사항
○ 14T MRI 시스템의 5 Gauss 안전영역 확보, 14T MRI 시스템 및 관련 연구시설 설치를 위한 부지와 건물 등에 대한 현금·현물 부담 필요(민간 매칭) ※ 참고 : 건축연면적 총 3,140m2이상의 부지를 포함한 건설공사비, 관련 장비구축 등 민간매칭 필요 예산 최소 496억원 추정(KDI 예비타당성보고서, ‘11.9) ○ 14T MRI 시스템 구축과정에서 다양한 분야 연구자 및 기관의 참여 확대방안 제시 ○ 14T MRI 시스템 구축 후 국가공동활용장비로써 활용계획 명시 ○ 연차별, 단계별 연구개발 일정 및 프로젝트 관리 방안을 제시 ○ 1차년도 추진과제 - 협력기관 간 공동연구개발협약 등 체결 - 14T MRI 시스템 사양 결정 ▪ Magnet System ▪ Spectrometer System ▪ RF System ▪ Gradient System ▪ Data Acquisition System 등 - 14T MRI 개발 기초연구 ▪ 영상기법 및 영상처리 기초기술개발 ▪ 14T MRI 영상 획득용 고성능 제반 전자장치 설계 및 연구개발 - 14T MRI 시스템 부지 및 건설공사비 확보, 연구시설 설계 확정 및 기초공사 진행 ○ 1단계(3년) 이내에 뇌과학 응용 연구 기반 구축을 위한 MRI 시스템 개발 완료
5. 총 연구기간 및 예산		5년간 정부지원 598억원 이내 (‘12년 30억원 이내)

			RFP번호	2
연구 분야	3차원 In-vitro 신경회로망 제작 및 응용 원천기술개발
1. 연구목표
○ 나노바이오 기술과 신경생물학의 체외세포배양기술을 융합한 3차원 체외 환경에서 뇌신경회로망을 제작하고, 제어 및 측정하는 원천기술을 확보하여 3차원 체외 뇌신경회로망을 활용한 신경생물학적 연구용 tool 개발
2. 연구내용 및 범위
○ 체외 환경에서 3차원 뇌신경회로 제작에 관한 원천 기술 확립 - 특정 신경회로망(예를 들어 hippocampal CA1-CA3 신경회로망)을 기능적 및 구조적으로 모사할 수 있는 3차원적 뇌신경회로망 구축 및 배양 기술 확립 - 3차원 뇌신경회로망에서 신경 교세포 (Oligodendrocyte 의 myelination, astrocyte 의 Synapse insulation 등)의 역할 재연하는 기술 확보 - 다양한 자극 (전기적, 화학적, 광학적, 기계적 자극등)과 신경 신호 측정이 동시에 가능한 3차원 뇌신경회로 배양 모델 개발 ○ 3차원 뇌신경 회로 검증을 위한 제어 및 측정 기술 확보 - 다른 유형의 신경 세포를 선택적으로 단일 신경 세포의 수준에서 자극하는 기술 - 3차원에서 다중 뉴런의 활성을 동시에 측정하는 기술 개발 - 3차원 뇌신경회로망 내의 뉴런 간 또는 교세포들 사이의 기능적 상호작용(3차원 뇌신경망내 물질 변화 또는 세포소기관등) 및 신경활성을 측정할 수 있는 새로운 측정 시스템 구축 - 3차원 뇌신경회로망의 해부학적 구조 측정 및 분석기술 개발 - 자극과 신경활성 측정을 통한 3차원 신경회로망 분석기술 ○ 3차원 모델의 신경 생물학적 응용 기술 확립 - 3차원적 특정 신경회로망을 이용하여 특정신경회로망에 기능이상여부에 의하여 발생하는 신경병리학적 모델 시스템의 구축 - 구축된 병리학적 모델시스템을 이용한 high-throughput 치료 약물검증 응용기술 개발
3. 추진방법
○ 총 연구기간은 5년(3+2)임 ○ 단계 평가를 통해 계속 지원여부, 연구기간, 연구예산 및 규모가 변경 될 수 있음 ○ 의학, 공학 등 다양한 분야 전문가가 참여하는 융합연구 형태로 기술개발 추진 ○ 네트워크 수준, 세포 수준 및 분자생물학적 수준의 협력 연구개발 추진
5. 총 연구기간 및 예산		5년간 총 25억원 내외 ('12년도 5억원 내외)

		RFP번호	3
연구 분야	인터넷(게임) 중독 및 공격성이 소아청소년의 뇌에 미치는 영향 규명 및 예방·치료기술 개발
1. 연구목표
인터넷(게임) 중독의 발병 및 공격성 유발과 연관된 뇌의 구조, 기능 및 인지 변화를 규명하고 이를 바탕으로 관련 뇌질환 예방 및 뇌조절기술 제안
2. 연구내용 및 범위
소아청소년에 대한 인터넷(게임) 중독의 신경생물학적 특성 규명 - 소아청소년 인터넷(게임) 중독의 고위험군 및 중독군을 대상으로 자기공명영상(MRI) 및 뇌파(EEG) 등을 적용하여 인터넷(게임)의 사용 수준에 따른 뇌의 특성을 분석 - 뇌의 기능을 반영하는 혈액학적 지표의 분석 - 정상사용자군과의 비교 및 연령에 따른 차이 탐색 소아청소년에서 인터넷(게임) 중독과 연관된 공격성에서 신경생물학적 특성 규명 - 인터넷(게임) 중독과 공격성 유발과의 관련성 - 인터넷(게임) 중독 청소년과 고위험군의 공격성 관련 뇌의 특성 분석 - 정상사용자군과의 비교 및 연령에 따른 차이 탐색 - 공격성 관련 특성과 성격 요인, 정신과적 공존 병리와의 상관관계 분석 - 게임의 특성에 따른 공격성 연구 인터넷(게임) 중독의 발병 및 공격성 유발의 뇌조절기술을 활용한 예방 및 치료 기술 탐색 - EEG, MRI 등의 뇌영상 기술과 혈액학적 변인을 토대로 인터넷(게임) 중독 및 공격성이 유발되는 과정에 대한 질병 모델의 규명 - 인터넷(게임) 중독 고위험군과 정상사용자군을 대상으로 각 시기별로 개입할 수 있는 뇌건강증진 기반 예방 기술 제안 - 인터넷(게임) 중독군에서의 신경생물학적 변화 모델을 기반으로 뇌조절 기술을 활용한 치료 기술 제안
3. 특기 사항
기존 선행연구와 차별적 연구전략 제시 효율적인 연구수행을 위해 의학, 심리학 등 관련 분야 간 공동연구협력체계로 구성 본 과제는 인터넷(게임) 중독의 뇌기능, 신체적·심리사회적 영향 연구 및 예방·치료기술 개발 분야에서 추진하는 단년도 시범연구과제로 ‘인터넷(게임) 중독 및 공격성 예방 및 치료기술 탐색’을 목표로 함
4. 2012년도 예산	정부 2억원 이내