산업공정에서 발생하는 VOCs 분리회수 플랜트 개발 (일반)

가. 개요

□ 개념 및 정의

o  석유화학분야의 화학공정, 자동차 도정 공정, 정유 산업 등에서 대기중으로 방출/소각처리되는 고가의 휘발성유기화합물(VOCs)은 환경부하 원인이 될 뿐만 아니라 경제적으로도 손실

o  특히 고분자 중합공정과 같이 비교적 고농도의 미반응 모노머가 대기중으로 방출되는 경우 이들을 효과적으로 분리회수하여 자원화 하는 기술이 필요

o  기존 공정의 단점을 보완하여 VOCs의 회수 효율 및 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 요소기술 개발을 통한 플랜트 기술 개발

나. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

o 최종 목표

- 발생 VOCs를 90% 이상의 회수율로 50 kg/h 이상을 회수 할 수 있는 플랜트개발

o 확보기술 내용

- 내구성 및 분리효율이 향상된 분리소재 등의 요소기술 개발

․ 내압성, 내유성, 내화학성, 기계적 강도 등이 우수한 분리소재 개발

․ 선택도, 처리유량 등이 우수한 분리소재 개발

- 에너지 효율 및 회수 효율이 향상된 플랜트 설계 기술

․ 일단 혹은 다단 공정을 이용하여 회수율 90% 이상을 달성할 수 있는 최     적 공정 설계

․ 기본적으로 연속운전이 가능하며 50 kg/h 이상의 처리용량을 가지는 플랜트           설계 및 제작

․ 에너지 효율이 개선된 요소기술 개발 적용

- 기존기술 활용

․ 기존 VOCs 분리회수 기술

‥ 막분리법

‥ 흡착법

‥ 심냉법

□ 연도별 목표 및 내용

<추진 마일스톤>

구 분	2010년	2011년	2012년
연도별 연구목표	o 공정에 최적화된 분리소재 개발	o 상업화 수준 분리 unit 제작 o 시스템 어셈블리 결정 및 공정변수 확보	o 최적 시스템 설계 o 프랜트 제작, 성능평가 및 공정 최적화
연도별 연구내용	o 기존 분리소재의 성능분석 o 내구성, 내화학성, 기계적 성능이 우수한 분리소재 개발 o prototype 분리unit 제작 및 성능평가	o Scale-up을 위한 설계 자료 확보 o 상업화 수준 분리 unit 설계 제작 및 성능평가 o 시스템 어셈블리에 따른 공정변수 확보 및 최적화	o 회수율 90%이상, 회수성능 50kg/h 이상의 최적 시스템 설계 o VOCs 회수 플랜트 제작 o 플랜트 성능평가 및 공정 최적화
연도별 주요결과물	o 성능이 향상된 분리소재 혹은 분리 unit	o 상업화 규모의 분리 uint o 최적 시스템 어셈블리	o 상용 플랜트 o 표준 설계 및 제작 기술

다. 추진체계 : 본 과제는 일반형으로 기획되었음

□ 주관기관 : 산업체

□ 참여기관 : 제한 없음

라. 연구기간 및 연구비

□ 연구기간 : 2010년 ~ 2012년 ( 3년간)

□ 정부출연한도 : 2010년도 4 억원, 2011년도  5억원, 2012년도  7억원

o 총사업비(정부+민간) : 20억원