정유․석유화학 Hydrocarbon용 특고온(350℃) 다단펌프 개발(일반)

가. 개요

□ 개념 및 정의

o  고온, 고압의 탄화수소 펌핑용 펌프

o  정유플랜트의 고도화 공정(HOU/FCC)의 메인 펌프

o  Hydrocarbon 펌핑은 대부분 정유․석유화학 플랜트의 핵심공정

나. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

o 최종 목표

- 정유․석유화학플랜트 Hydrocabon 서비스용 특고온(350℃), 고압(200 barg),  유량(500 m3/hr), 효율 76%이상의 다단원심펌프의 국산화 기술개발

o 확보기술 내용

- API 610 BB5형식 Hydrocabon용 다단펌프 기술조사

- 펌프 레이아웃 구성/배치 설계

- 고효율 임펠러/디퓨저 설계 및 CFD해석

- 로터다이나믹스, 윤활 및 씰링 설계 및 해석

- 고온 고압 구조 설계해석

- 주요 구성부품 제작, 시험, 설계검증

- 시제품 제작 조립 및 성능시험

- 신뢰성 검증, 보완, 시제품 개발완료

o 기존기술 활용

- 펌프 내 일반 부품 및 소재 기술

□ 연도별 목표 및 내용

<추진 마일스톤>

구 분	2010년	2011 년	2012 년
연도별 연구목표	o 펌프 기본설계 및 해석방법의 확립	o 펌프 상세설계 및 성능시험 장치 확립	o 펌프 시험을 통한 성능 및 신뢰성 확보
연도별 연구내용	o 1차년도 주요 내용 - API 610 BB5 Type 펌프의 주요기술 조사분석 - 펌프 레이아웃 및 기본 설계 - 고효율 임펠러/볼류 수력설계 및 CFD해석 - 로터다이나믹스, 윤활 및 씰링의 기본 설계 및 해석 - 고온/고압 기본 구조 설계해석 - 수력구성품(임펠러, 디퓨저) 제작	o 2차년도 주요 내용 - 시제 설계의 CFD 수력성능 설계해석 - 로터다이나믹스, 베어링/윤활 및 씰링의 상세 설계 및 해석 - 고온/고압 상세 구조 설계해석 - 수력구성품(임펠러, 디퓨저) 수력 성능시험 및 설계 검증 - 시제품 레이아웃 설계완성 및 시제 제작조립 - 성능시험장치 설계	o 3차년도 주요 내용 - 시제 펌프의 성능시험장치 설치 및 보완 - 시제 펌프의 수력 성능시험 및 신뢰성 시험 - 설계보완 및 시제품 개발완료
연도별 주요결과물	o 펌프 기본설계 o 수력 구성품	o 펌프 시제품 o 펌프 구성품의 수력 성능시험 결과	o 시제 펌프의 수력 성능 및 신뢰성 시험 결과

다. 추진체계 : 본 과제는 일반형으로 기획되었음

□ 주관기관 :  산업체

□ 참여기관 :  산업체, 대학, 연구소

라. 연구기간 및 연구비

□ 연구기간 : 2010년 ~ 2012년 ( 3년간)

□ 정부출연한도 : 2010년도 5 억원, 2011년도 9 억원, 2012년도 8 억원

o 총사업비(정부+민간) : 25억원