극한환경용 구조물 부식제어 기반구축사업 RFP (기반구축)

가. 개요

□ 개요 및 필요성

o 부식제어 기술의 고도화를 위한 민간 주도형 수평적 기술협력거점 및 지원체계 구축을 통하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 전문(강소)기업 육성

o 극한환경(고온, 고압, 저온, 해상, 수중, 화학물질, 원자력 등)용 구조물 부식제어기술의 안전성 및 강화되는 환경규제에 대한 대응을 위한 부방식 기술개발, 기업지원, 국제인증 대응 및 고급기술 교육 요구 증대

o 증소․중견기업의 부식제어 전문기술을 바탕으로, 기업간 협력적 기술개발체계 구축에 관련한 기반 조성 및 기술지원이 시급

나. 기반구축 목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

o 최종 목표

- 극한환경용 구조물 부식제어 기술에 특화된 기업지원 기반 구축

․ 부식제어 분야 신뢰성평가기법, 신공정 기술 및 현장기술 지원체계 구축

․ 부식제어 관련 고급기술 및 글로벌 인증 교육 지원체계 구축

o 내용

부식제어 관련 협력기술개발을 지원하는 개방형 장비 및 시설 구축

․ 현장 기술인증 장비 및 설비

․ 신공정 기술평가 장비 및 설비

부식제어 관련 신뢰성 평가기법 개발 기술지원

․ 철구조물용 도막의 신뢰성 평가로 수명을 예측하는 기법을 개발하도록 지원

․ 초내후성 시험, 해양환경 시험 및 대기환경 시험평가 기법 등

2차원 재료를 이용한 신개념의 도료개발 지원

․ 2차원 재료(그래핀, MoS2 등) 2차원 재료를 활용하여 생산성 확보를 위한 기술지원

용접부위 생성물 제거 및 방식시스템 개발 지원

․ 용접시 발생한 용접생성물 억제 및 용접부위의 부식을 방지하는 화합물 개발지원

부식제어 관련 고급 기술교육 지원

․ 국제기관과 연계한 부방식 분야 기술인증 교육 지원

□ 연도별 목표 및 내용

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
연도별 목표	◦부식제어 신뢰성 기술기반 구축 및 전용 센터확보	◦부식제어 기술분석 및 현장기술인증 기반 구축	◦해양환경 및 대기환경 분야 기술지원 기반구축	◦부식제어 기술 표면분석 지원 기반구축	◦부식제어 기술 성능평가 지원 기반구축
사업 내용	◦센터건물 및 전용시설 구축 ◦신뢰성평가 기술지원장비 구축 - 내후성 평가 - 실시간 부식 측정 시스템 ◦신개념 도료개발 지원(1단계) - 수송기기분야 ◦도장방식분야 전문인력 양성 - 도장방식전문가 교육(초급)	◦신뢰성시험 기술지원실 완료 ◦기술분석 및 현장기술 지원장비 - 도장기술분석 - 도장공 기능인증 장비 및 설비 ◦신개념 도료개발 지원(2단계) - 수송기기분야 ◦신뢰성 평가기법 개발지원 - 초내후성시험 ◦도장방식분야 전문인력 양성 - 도장방식전문가 교육 (중급1단계)	◦현장기술지원실 완료 ◦해양 및 대기환경 시험장비 - 해양환경시험 - 대기환경시험 ◦신개념 도료개발 지원(3단계) - 수송기기분야 ◦용접생성물제거기술지원 - 자동차산업분야 ◦도장방식분야 전문인력 양성 - 도장방식전문가 교육(중급 2단계)	◦해양환경 및 대기환경 시험실 완료 ◦표면분석장비 - 표면분석 ◦신뢰성 평가기법 개발지원 - 해양환경분야 - 대기환경분야 ◦용접생성물제거기술지원 - 해양산업분야 ◦도장방식분야 전문인력 양성 - 도장방식전문가 교육(고급 1단계)	◦성능평가실 완료 ◦성능평가장비 - 도막성능평가 ◦신뢰성 평가기법 개발지원 - 시험결과 분석 및 평가 ◦용접생성물제거기술지원 - 강구조물 분야 ◦도장방식분야 전문인력 양성 - 도장방식전문가 교육(고급 2단계) - 기술전문대학원 과정 연계
연도별 주요 성과	◦부식제어 기술지원 센터 공간확보 ◦신뢰성 평가 기술장비 구축 및 신개념 도료개발 지원 ◦초급기술 교육과정 수료 지원 등	◦신뢰성 시험 공간 확보 ◦현장기술 지원장비 구축 및 신뢰성평가 기술 지원 ◦중급기술 교육과정 수료 지원 등	◦현장기술지원 공간 확보 ◦해양 및 대기환경 평가 장비 및 용접생성물제거 기술지원 ◦중급기술 교육과정 수료 지원 등	◦환경시험실 구축 완료 ◦표면분석장비 및 신뢰성평가기술 지원 ◦고급기술 교육과정 수료 지원 등	◦성능평가실 구축완료 ◦도막성능평가장비 및 용접 생성물 제거 기술지원 ◦고급기술 교육과정 수료 지원 등

다. 연구기간 및 연구비

연구기간	2016 ~ 2020 (5개년)
연구비	연차별 국비 지원액(백만원)
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
금액	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000

* 상기의 정부출연금(국비)은 예산 현황 및 평가결과에 따라 연차별로 변동 가능

** 국비지원기준

- 부지/건축 : 국비지원 불가(지자체 및 민간부담)

- 장비 : 국비는 소요금액의 70%이내(최대 100억원) 범위에서 지원

라. 활용방안

o 구축된 인프라를 이용하여, 부식제어관련 기업들의 협력기술 클러스터를 구축하고, 관련 기술고도화와 국제기술규정 및 표준화 관련 대응기술 개발지원에 활용

o 현장인력의 부식제어 기술에 대한 체계적인 전문교육 및 기술인증기관으로 활용