지능형기계산업 제조‧기능안전 기술고도화 지원 기반구축사업 RFP (기반구축)

과제명 : 지능형기계산업 제조‧기능안전 기술고도화 지원 기반구축사업

가. 개요 및 필요성

□ 사업개요

o 지능형기계의 제조와 기능안전 기술고도화를 위한 인프라 구축 및 기업지원으로

지능형기계 산업 생태계 육성 및 4차 산업혁명 대비

* 지능형기계: 기존 생산기계에 ICT 융·복합화를 통해 자율화 및 고 성능·고 효율화된 기계

□ 필요성

ㅇ 지능형기계산업 기술고도화로 지역혁신 성장동력 재창출 및 일자리 창출

ㅇ 지능형기계의 제조엔지니어링 기술지원과 기능안전 신뢰성 평가 체계 구축 필요

- 개발기간 단축, 생산성 극대화로의 시장변화 및 스마트공장 보급·확산에 따른

제조엔지니어링 기술고도화 필요

- 생산기계 및 제조공정의 융·복합화, 무인화, 자율화에 대응하는 기능안전(제어SW

안전성, 전자기적합성, 내환경·신뢰성) 기술고도화 필요

나. 기반구축 목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 지능형기계산업을 제조와 기능안전 기술고도화를 통하여 스마트공장 구현에 적합한  기술수준으로 향상시켜 지능형기계산업 고부가가치화와 지역혁신 성장동력 재창출

□ 사업 내용

ㅇ (전용공간 조성) 지능형기계 제조‧기능안전 기술고도화를 위한 전용공간 조성 및 운영

ㅇ (장비구축) 제조엔지니어링 및 기능안전(제어SW, 전자기적합성, 내환경·신뢰성)

신뢰성평가 시험장비 및 공인시험체계 구축

ㅇ (기업지원) 제조엔지니어링 및 기능안전 기술고도화 달성을 위한 기술지원

지역산업진흥사업과 연계한 기업지원 및 네트워킹

제조‧기능안전 전문인력양성

□ 연도별 목표 및 내용

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
연도별 목표	ㅇ지능형기계 제조‧기능안전 인프라 구축 및 기업지원기반 마련	ㅇ지능형기계 제조‧기능안전 인프라 구축 및 기업지원 생태계 조성	ㅇ지능형기계 제조‧기능안전 인프라 구축 및 기술지원· 신뢰성 평가체계 마련	ㅇ지능형기계 제조‧기능안전 인프라 구축 및 기술지원· 신뢰성 평가체계 구축· 활성화	ㅇ지능형기계 제조‧기능안전 인프라 구축 및 기술고도화 지원
연도별 내용	[기반구축] ◦제조엔지니어링 지원동 설계 ◦제조엔지니어링 소프트웨어(SW) 장비구축(1/3) ◦기능안전 장비구축 -SW 기능안전 분석· 평가장비(1/3) [기업지원] ◦지역산업진흥사업 연계 기업지원 플랫폼 구축 -제조엔지니어링 및 기능안전 지원체계 구축	[기반구축] ◦제조엔지니어링 지원동 착공 ◦제조엔지니어링 SW 장비구축 (2/3)) ◦기능안전 장비구축 - SW 기능안전 분석·평가장비(2/3) [기업지원] ◦제조엔지니어링 기술지원, 전문인력 양성, 네트워킹 ◦기능안전 평가 기술지원, 컨설팅, 전문인력 양성, 네트워킹	[기반구축] ◦제조엔지니어링 지원동 준공 ◦제조엔지니어링 SW 장비구축 (3/3) ◦기능안전 장비구축 -SW 기능안전 분석 ·평가 장비(3/3) -내 환경·신뢰성 및 전자기적합성 평가장비(1/3) [기업지원] ◦제조엔지니어링 기술지원, 전문인력 양성, 네트워킹 ◦기능안전 평가 컨설팅, 시험인증, 전문인력 양성, 네트워킹	[기반구축] ◦기능안전 장비구축 -내 환경·신뢰성 및 전자기기적합성 평가 장비(2/3) [기업지원] ◦제조엔지니어링 기술지원, 전문인력 양성, 네트워킹 ◦기능안전 평가 기술지원, 컨설팅, 시험인증, KOLAS, 전문인력 양성, 네트워킹	[기반구축] ◦기능안전 장비구축 -내 환경·신뢰성 평가 장비(3/3) [기업지원] ◦제조엔지니어링 기술지원, 전문인력 양성, 네트워킹 ◦기능안전 평가 기술지원, 컨설팅, 시험인증, KOLAS, 전문인력 양성, 네트워킹
연도별 주요성과	◦제조엔지니어링 지원동 설계 ◦제조엔지니어링 및 기능안전 SW 장비구축	◦제조엔지니어링 지원동 건축 착공 ◦제조엔지니어링 및 기능안전 SW 장비구축 ◦제조엔지니어링 기술 확보 및 기업지원 ◦기능안전 평가기술 개발 및 기업지원	◦제조엔지니어링 지원동 건축 준공 ◦제조엔지니어링 및 기능안전 장비 집적화 ◦전자기적합성 및 내환경·신뢰성 시험평가시스템 구축 ◦제조엔지니어링 기술 확보 및 기업지원 ◦기능안전 평가기술 개발 및 기업지원	◦기능안전 장비구축 ◦기능안전(전자기적합성,내환경·신뢰성) 공인시험기관(KOLAS) 운영 ◦제조엔지니어링 기술 확보 및 기업지원 ◦기능안전 평가기술 개발 및 기업지원	◦기능안전 장비구축 ◦기능안전(전자기적합성,내환경·신뢰성) 공인시험기관(KOLAS) 운영 ◦제조엔지니어링 기술 확보 및 기업지원 ◦기능안전 평가기술 개발 및 기업지원

다. 주관기관/총 수행기간/정부출연금

□ 주관기관 : 연구기관, 대학 등 비영리기관

□ 총 수행기간 : 2018 ∼ 2022년 (총 5년 이내)

□ 총 정부출연금(18년 정부출연금) : 10,000백만원 이내(2,000백만원 이내)

* 상기의 정부출연금(국비)은 예산 현황 및 평가결과에 따라 연차별로 변동 가능성 있음.  (전담기관 기획평가관리비를 포함)

** 국비지원기준 :「지역산업지원사업 기반조성사업 평가관리지침」 <별표11> 사업비 구분별 출연금 인정기준 참조