□ 무상원조 표준 사업 절차 (간략)

PCP 접수 (n-2년 10월∼12월)		시행기관		수원국 사업요청서(PCP:Project Concept Paper) 접수
기관 간 예비사업 연계 (n-2년 11∼12월)		국조실 외교부		각 시행기관이 ODA 통합시스템에 예비조사사업을 입력하고, 이 정보를 기초로 시행기관들의 연계 희망사업 조사
사업타당성 조사 (n-1년 2월)		시행기관		현지 조사를 통해 사업 타당성 확인 및 사업 기본계획 수립
차년도 무상원조 시행계획 제출 (n-1년 ~3월초)		외교부		차년도 무상원조 시행계획 외교부 제출
시행계획 예비검토 (n-1년 3월중순~4월초)		외교부 재외공관		재외공관에서 무상원조 사업에 대한 검토 분야별 민간전문가들의 무상원조 사업 검토
기관 간 협의회 및 무상원조 분과협의회 (n-1년 3~4월)		외교부 재외공관		각 시행기관을 대상으로 기관 간 협의회 개최
무상원조 관계기관 협의회 (n-1년 4~5월)		외교부 시행기관		무상원조 관계기관 협의회(외교부 2차관 주재)를 통한 주관기관 차원의 조정·심의
차년도 무상원조 종합시행계획 국조실 송부 (n-1년 5월)		외교부 국조실		국개위 심의를 위해 차년도 무상원조 종합시행계획(잠정)을 국조실에 송부
국개위 심의·의결 (n-1년 5월말)		국개위 (국조실)		차년도 무상원조 종합시행계획 심의 및 잠정 의결
예산당국 심의 (n-1년 6~11월)		예산당국 시행기관		국개위에서 의결한 ODA 종합시행계획을 기초로 기재부 및 국회 심의
국개위 심의·의결 (n-1년 12월 말)		국개위 (국조실)		차년도 무상원조 시행계획 최종 확정
사업실시 (n년)		시행기관		수원기관과의 약정체결 등은 n-1년 말부터 준비
평가 및 사후관리		시행기관		중간/종료 평가를 통한 사업성과 측정 사후관리를 통한 지속가능성 확보
이행점검 및 모니터링		외교부 재외공관		외교부 이행점검 및 재외공관 모니터링을 통한 ODA 사업점검

□ 무상원조 표준 사업 절차 (상세)

단계별 시기	내용	주관
사업 발굴 (상시)	- 수원국 정부와의 협의, 현지 기초조사 등을 통해 개발수요 확인 및 우수사업 형성	시행기관
재외공관과의 협의 (상시) * 주관기관 협의	- 사업 발굴 과정부터 재외공관과의 정보 공유 및 협의 필요 ※ 사업 발굴 단계 뿐 아니라 사업 주요 단계마다 재외공관과의 정보 공유 및 협업 필요 - 재외공관과의 협의시 주관기관을 경유하는 것이 원칙 ※ 향후 사업 추진 계획을 외교부와 협의하고, 협조사항에 대해 논의하는 것이 통합적, 체계적, 효과적 ODA 수행 측면에서 바람직	시행기관
PCP 접수	- 수원국 사업요청서(PCP: Project Concept Paper) 접수	시행기관
주관기관-시행기관 협의 (n-2년 11월경)	시행기관의 사업 발굴‧기획 현황 및 무상사업간 연계 방안 논의	외교부 / 시행기관
n-2 기관 간 예비사업 연계 (n-2년 11-12월)	- 각 시행기관이 ODA 통합시스템에 예비조사 사업을 입력하고, 동 정보를 기초로 시행기관들의 연계 희망사업 조사 - 무상 예비사업 간(외교부) 및 유무상 예비사업 간(국조실) 연계 검토 ※ 연계사업 소관 시행기관 간 긴밀한 협의를 통해 사업 형성 및 사업 이행 과정에서 실제 시너지를 창출할 수 있도록 노력 ※ 주관기관 및 국개위 사무기구는 연계사업에 대한 보다 구체적인 인센티브 마련 노력	국조실 / 외교부
사전타당성 조사 (예비 현지조사) (n-1년 2월 중순까지)	- 현지 조사를 통해 사업 타당성 확인 및 사업 기본계획 수립 ※ △프로젝트, △프로그램, △개발컨설팅 등의 사업에 대해서는 사전 타당성 조사 반드시 실시 필요 - 객관성 제고를 위해 사업 수행기관의 사전타당성조사는 지양 ※ 100만불 이상의 사업에 대해서는 타당성조사단에 민간전문가 포함 필요	각 시행기관
시행계획 작성지침 안내 (n-1년 1월말-2월초)	- 차년도 무상원조 시행계획 작성지침 안내	외교부
내부 사업 심사 (n-1년 2월말까지)	- 기관별 사업심사위원회(가급적 외부 전문가 포함 권고)를 통해 신규 후보사업 선정	시행기관
차년도 무상원조 시행계획 작성 및 외교부에 제출 (n-1년 2월말-3월초)	차년도 무상원조 시행계획을 양식에 따라 작성, 외교부에 제출	시행기관
재외공관 및 민간전문가의 예비검토 (n-1년 3월 중순-4월초)	- 해당 재외공관에 무상원조 사업(신규)에 대한 예비 검토 요청 ※ 약 10일 소요 - 분야별 민간전문가들의 무상원조 사업 예비 검토 ※ 2주 이상 소요	외교부/ 재외공관
기관 간 협의회 및 무상원조 분과협의회 (n-1년 3-4월)	- 각 시행기관 대상 기관 간 협의회 개최 ※ 기존에는 전체 시행기관이 참여하는 분과별 무상원조관계기관협의회가 개최되었으나, 심도 있는 논의가 이루어지지 못함에 따라, 2018년부터는 외교부-개별 시행기관 또는 외교부-복수 시행기관 간 협의 방식으로 조정·심의 진행 ※ 2020년부터 기관 간 1:1 협의 대상사업은 사전에 공유할 예정이며, 민간 전문가 참여 추진 계획 - 필요시 추가 분과협의회 개최를 통한 보완 (연수/봉사단 파견 사업 등 전 기관을 대상으로 한 분과협의체는 필요)	외교부/ 시행기관
무상원조관계기관협의회 (n-1년 5월)	무상원조관계기관협의회(외교부 2차관 주재)를 통한 주관기관 차원의 조정·심의 완료	외교부/ 시행기관
무상개발협력전략회의 (n-1년 5월말 또는 6월초)	무상개발협력전략회의(외교부장관 주재)를 통해 무상분야 시행계획안 작성, 국제개발협력위원회 제출	외교부/ 시행기관
국제개발협력위원회 심의·의결 (요구액) (n-1년 6월)	유무상 연계사업 발굴 검토 및 ODA 사업과 국가적 정책‧전략의 연계성을 검토하는 전략부합성 심사 실시 차년도 종합시행계획(요구액 기준) 의결	국개위 (국조실)
예산당국 심의 (n-1년 6-11월)	국개위에서 의결한 ODA 종합시행계획을 기초로 각 시행기관은 기획재정부 및 국회측과 예산 협의	예산당국/ 시행기관
예산 확정 및 종합시행계획 업데이트 (n-1년 12월 초-중순)	12월 초 예산안이 국회 본회의를 통과하면, 직전 종합시행계획(요구액 기준)상의 변동사항을 업데이트하여 국개위 확정 준비	국조실/외교부/시행기관
국제개발협력위원회 심의·의결 (확정) (n-1년 12월경)	차년도 종합시행계획 최종 확정	국개위 (국조실)
사업 실시 (n년)	n년도 사업 실시를 위한 최종 기획조사 및 수원국 기관과의 약정 체결 등은 전년도(n-1) 예산 반영 여부 등을 확인하며 n-1년 말부터 준비 사전 준비 완료시 국별/기관별 상황에 맞게 사업 실시	시행기관
평가 및 사후관리 (사업 진행 및 종료 단계)	중간/종료 평가를 통한 사업 성과 측정 사후관리를 통한 사업 지속가능성 확보	시행기관
이행점검 및 모니터링 (사업 진행 및 종료 단계)	외교부 이행점검 및 재외공관 모니터링을 통한 현장 ODA 사업 점검 ※ 이행점검시 시행기관, 민간전문가 참여	외교부/ 재외공관